문서번호	미래첨단교통과-5918
결재일자	2022. 12. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		대중교통정보팀장	미래첨단교통과장
김경진		가순종	12/09
			이수진
협조
	주무관		오수년

「2022년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 및 교체 사업」

실정보고 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.  12. 9. (금)

도 시 교 통 실

(미래첨단교통과)

「2022년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 및 교체 사업」

실정보고 검토 보고

미래첨단교통과장 :이수진☎2133-4950 대중교통정보팀장 :가순종☎4968 담당 : 김경진☎4971

「2022년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 및 교체 사업」과 관련하여 현장여건 변경으로 인한 물량 증감에 따른 실정보고 검토를 아래와 같이 결과 보고 드림.

□ 관련근거

ㅇ 기술검토 의견서 제출건 : GD********8-01(2022.12.)

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 2022년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 및 교체

ㅇ 사업규모 : 버스정보안내단말기 140대

ㅇ 사업기간 : 계약일로부터 ~ 2022.12.31.

ㅇ 총사업비 : 1,383백만원

ㅇ 시행사/감리사 : 한국정보기술(주)/(주)가델

□ 주요 실정보고 개요

ㅇ 주요 실정보고 내용

- 전기수전 등 굴착복구 공사 물량 변경 필요

- 가로등 전원활용을 위한 배터리 3개 추가

- 현장 여건을 반영 BIT 설치타입 변경(알뜰형 증1, 미니형 감1)

구 분	수 량		증·감
	기 존	변 경
***	***	***	*
***	**	**	*********
미**	*	*	*********
계	140	140	남산타워 1 별도

ㅇ 사업금액 변경

구분	수량		금액(천원)		증·감
	기존	변경	기존	변경
설치사업	***	***	*********	*********	***************

□ 감리검토 의견

ㅇ 전기수전불가, 민원발생 등으로 BIT 설치 위치 및 타입 변경이 되었고,

ㅇ 현장여건으로 인하여 시공물량(배관, 터파기 등)과 배터리 함체 추가 등으로 물량 조정이 불가피하여 이를 반영한 사항으로 검토한 결과 이상없음

□ 검토의견 및 조치계획

ㅇ 현장 여건에 따른 물량변경 등으로 실정보고 사항을 승인하여 설계변경 후 준공처리하고자 함

□ 향후 계획

ㅇ 설계변경에 대하여 계약변경 : 2022. 12. 20.한

ㅇ 준공검사 실시 및 준공조서 제출(준공일 : '22.12.31.)

붙임 : 1. 감리검토의견서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.  끝.