문서번호	시설과-28243
결재일자	2022. 12. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	관리부장		서울대공원장
김성현	문석기	이이동		12/09
				김재용
협 조
	주무관		김희원

2022년 서울대공원 전기시설물 유지보수공사(연간단가) 최종 설계변경 검토 보고

2022.12.

서울대공원 시설과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2022년 서울대공원 전기시설물 유지보수공사(연간단가)
최종 설계변경 검토 보고

우리 대공원에서 시행 중인 “2022년 서울대공원 전기시설물 유지보수공사(연간단가)”와 관련하여 계약물량, 신규내역 추가 및 제경비 정산 등 최종 설계변경을 시행하고 준공처리하고자 보고드림

1		공사 개요

○ 공 사 명 : 2022년 서울대공원 전기시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2022.3.3. ~ 12.31.

○ 공사내용

․ 주변전실 및 지구변전실 15개소 전기설비 유지보수

․ 업무시설 및 동물사 185동 전기설비 유지보수

․ 원내 공원등 긴급보수 및 기타 전기설비 유지보수

○ *************************

○ *******************

2		공사내용

○ 작업지시 1~8차에 따른 계약물량 변경 및 신규 내역 추가

․ 각 동물사 및 공원 내 설비 증설 및 노후에 따른 전력간선공사 시행

․ 각 동물사 및 공원 내 전등 및 전열공사 시행

․ 각 동물사 및 공원 내 노후 분전반, 차단기 및 속판 교체 시행

․ 각 동물사 및 공원 내 기계설비 전원공사 시행

․ AZA인증 후속조치 위해도 평가 및 현장점검에 따른 동물사별 요구사항 조치

○ 집중호우에 따른 원내 공원등 긴급보수에 따른 배관·배선 및 공원등
교체 물량 증가(시설과-24345호, 2022.8.17.)

3		설계변경 내용

○ 각 제경비(건강, 연금, 노인장기요양보험, 산업안전보건관리비) 정산

○ 작업내역에 따른 도급비 변경

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
도급비	공사원가	***********	***********	**************
	부가가치세	**********	**********	*************
	총 계	***********	***********	**************

○ *******************************

************************************

***********************

*************************************

****************************

******************************** ************

4		조치 계획

○ 상기 변경내용과 같이 변경계약(정산)을 시행하고 준공하고자 함

5		행정 사항

○ 최종 설계변경에 따른 변경계약 시행

○ 공사 준공 및 대금지급

붙임 1. 수량산출 집계표 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 검증확인서 1부. 끝.