현장중심! 민생중심! 더불어 행복한 성북
	성 북 구
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 도로시설물 유지보수공사 1권역(연간단가) 설계변경(2회) 시행

우리구에서 시행중인『2022년 도로시설물 유지보수공사 1권역(연간단가)』에 대하여 다음과 같이 설계변경(2회)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2022년 도로시설물 유지보수공사 1권역(연간단가)

2. 공사기간 : 2022. 03.22. ~ 2022. 12. 31.

3. 계약금액 : ***************************

4. 계약상대자 : ㈜다온디자인 대표 박영하

5. 설계변경 사유 : 추경예산 사업 반영으로 인한 시공물량 증·감 발생

6. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 감		비 고
총사업비	*************	*************	*	***********
도 급 비	***********	*************	*	***********
관 급 비	***********	***********	*	***********
이 전 비	***********	**********	*	**********

7. 예산과목

- 도로과, 안전하고 쾌적한 도로환경 조성, 환경친화적이고 특색있는 도로관리, 도로시설물 유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비(구비)

- 도로과, 안전하고 쾌적한 도로환경 조성, 환경친화적이고 특색있는 도로관리, 과속방지턱 설치 및 도색공사, 시설비 및 부대비, 시설비(구비)

붙임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 일상감사 결과 및 의견서 1부.

4 설계변경 검토보고 1부.  끝.

주무관	이지호		도로시설담당	代한상오		도로과장	代김재준		건설교통국장	12/09
김석우
협조자	계약담당	신정경		재무과장	강은주
시행	도로과-22700	(	2022.12.09	)	접수		(		)
우	02848	서울특별시 성북구 보문로 168	/	http://www.sb.go.kr
전화	02-2241-3562	/전송	02-2241-6561	/	20150124494@sb.go.kr	/	부분공개(5)