문서번호	시설관리과-27650
결재일자	2022. 12. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
박건수		신근호	12/07
			강호광
협 조
	주무관			강정구
	주무관			박경원
	주무관			임춘길
	주무관			최경서

대형 제수밸브 점검정비 용역(강남지역)

설계변경 심의위원회 개최 계획

2022. 12.

상수도사업본부

(시 설 부)

대형 제수밸브 점검정비 용역(강남지역)

설계변경 심의위원회 개최 계획

「대형 제수밸브 점검정비 용역」의 설계변경 심의위원회를 개최하여 변경사항에 대한 적정성을 심의하여 정산하고자 함

□ 용역 개요

ㅇ 용 역 명 : 대형 제수밸브 점검․정비 용역(강남지역)

ㅇ 용역대상

- 강남지역 400㎜이상 버터플라이밸브(1,944개, 설치 후 3년 이상 경과)

ㅇ 용역기간 : ‛22. 04. 12. ~ 12. 9.

연번	용 역 명	사업규모	계약금액 (천원)	용역사
계		************	*********
1	대형제수밸브 점검정비 용역(강서,남부지역)	************	********	************
2	대형제수밸브 점검정비 용역(강남,강동지역)	**********	********	************

※ 한강 이남, 이북지역으로 구분하여 격년제로 대형제수밸브 점검·정비용역 시행

□ 주요 과업내용

ㅇ 대형제수밸브(D=400mm 이상) 및 밸브실 점검정비

- 버터플라이 밸브 기어박스 분해 및 윤활유 교체

- 누수 확인 및 노후 볼트 너트 교체

- 밸브 파손상태, 녹발생 등 외관조사

- 밸브 작동 여부 확인

<밸브실 환기>	<볼트점검 및 교체>	<기어박스 운활유 주입>	<밸브세척>

□ 추진 경과

ㅇ ‘22. 4. 11. : 계약 체결

ㅇ ‘22. 4. 14. : 안전교육 및 장비점검 실시(대현산배수지)

ㅇ ‘22. 4. ~ 5. : 각 수도사업소 사업설명회 개최

ㅇ ‘22. 5. 10. : 착수보고회 개최(상수도본부)

ㅇ ‘22. 9. 29. : 중간보고회 개최(상수도본부)

ㅇ ‘22. 12. 2. : 최종보고회 개최(상수도본부)

□ 설계변경 내용

ㅇ 설계변경 사유

- 실제 용역 진행에 따른 점검정비 물량 증감 반영

- 아리수정수센터 추가 물량 반영

- 교통통제에 따른 야간 점검정비 증감 반영

- 산업안전보건관리비 정산

ㅇ 계약금액 변경

구 분		금액변경		증감
		변경전	변경후
***********		*********	*********	*********
	********	*********	*********	***********
	*******	*********	*********	***********
	******** ************	********	********	********
***********		*********	*********	*********
	********	*********	*********	************
	*******	*********	*********	************
	******** ************	********	********	***********

ㅇ 설계변경 사항

구 분	물량변경(개소)		증감
	변경전	변경후
*	*****	*****	*****
***********	*****	*****	*****
***********	***	*****	*****

※ 상세내역은 붙임 설계변경 요약보고서 및 내역서 참조

□ 설계변경 심의위원회

ㅇ 설계변경 심의위원회 개최

- 건    명 : 대형제수밸브 점검정비 용역(강서, 남부)

대형제수밸브 점검정비 용역(강남, 강동)

- 일    시 : 2022. 12. 7.(수) 13:00

- 장    소 : 4층 소회의실

- 개최사유 : 설계변경 적정성 심의

ㅇ 설계변경 심의위원회 구성

- 위 원 장 : 시설관리과장

- 위    원 : 시설6급 강정구, 박경원, 임춘길, 최경서

- 간    사 : 시설7급 박건수

□ 향후계획

ㅇ 용역 변경계약 의뢰 (→본부 재무회계과)

ㅇ 용역 준공검사 및 준공 시행

붙임  1. 설계변경 요약보고서 각 1부.

2. 변경내역서 각 1부. 끝.