아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경 및 변경계약 의뢰 [나들목 리모델링 공사(염창나들목 외2) 건설폐기물 처리용역]

우리 부서에서 시행중인 「나들목 리모델링 공사(염창나들목 외2) 건설폐기물 처리용역」에 대하여 아래와 같이 설계변경 및 변경계약을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 나들목 리모델링 공사(염창나들목 외2) 건설폐기물 처리용역

2. 공사기간 : 2021 09. 15. ~ 2023. 09. 14.

3. 계약금액 : 101,013,000원

4. 계 약 자 : (주)라임에코, 경기이엔티(주)

5. 변경금액

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증․감	비 고
총용역비		101,013,000	101,981,000	증) 968,000
도급비	공급가액	91,830,000	92,710,000	증) 880,000
	부가가치세	9,183,000	9,271,000	증) 88,000
	소 계	101,013,000	101,981,000	증) 968,000

6. 변경사유 : 즈믄길 나들목 외 2개소 리모델링 공사 폐기물 정산 물량증감 내역 반영

7. 예산과목 : 한강사업본부 치수과, 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 접근시설 유지관리, 시설비및부대비,시설비(예산편성 : 한강사업본부 기획예산과)

붙임 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	치 수 과 장
주무관	유현진		치수과장	12/09
최연호
협조자	주무관	이준용		총무과장	정현석
시행	치수과-25238	(	2022.12.09	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0648	/전송	02-3780-0744	/	yuhj9410@seoul.go.kr	/	부분공개(5)