문서번호	토목부-36055
결재일자	2022. 12. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이상현		代김광호	12/09
			하현석
협조	주무관		이회진
	주무관		권해엽

- 창동 상계 동서간 연결교량 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 -  설계변경(전체 3회, 2차 1회) 및 발주계획(3차) 검토 보고

- 창동 상계 동서간 연결교량 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 -

설계변경(전체 3회, 2차 1회) 및 발주계획(3차) 검토 보고

2022. 12.

도시기반시설본부

(토        목        부)

- 창동 상계 동서간 연결교량 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 -

설계변경(전체 3회, 2차 1회) 및 발주계획(3차) 검토 보고

「창동 상계 동서간 연결교량 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역」의 효율적인 업무수행을 위해 설계변경 및 발주계획을 검토 후 보고 드림

※ 관련근거 : 감리부-22-01985(2022.12.08.)호

□ 용역 개요

ㅇ 용 역 명: 창동 상계 동서간 연결교량 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

ㅇ 공사규모

- 보차도교 설치 B=32m, L=118m / 보행교 설치 B=10.5~15m, L=110.5m

- (헌릉로)중앙버스전용차로 설치 L=3.2km 버스정류장 8개소

ㅇ 용역기간: '21.04.19.∼'24.05.17.(2차 '22.03.19.∼'22.12.31.)

ㅇ 용 역 비: **********************

ㅇ 계 약 자: ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 외 1개사

□ 설계변경 검토

ㅇ 설계변경 사유

- 공사 추진에 따른 건설사업기관리술인 투입계획 조정

- 헌릉로 중앙버스전용차로 설치공사 공기연장(예정)에 따른 감리 투입기간 연장※ 헌릉로 감리원 투입 : 당초 '22.10.31.까지 → 변경 '23.08.15.까지

ㅇ 변경 내용

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
전체 3회	도 급 액	*****************	*************	**************
	용역기간	********** ************	********** ************	*
2차 1회	도 급 액	***********	***********	**************
	용역기간	********** ************	********** ************	*

ㅇ 전체 용역 투입인원 변경 현황

ㅇ 2차 용역 투입인원 변경 현황

□ 발주계획(3차)

ㅇ 계약 현황                                    (단위 : 백만원)

구 분	전 체	이전(~2차)	금차(3차)	장 래	비 고
도 급 액	*********	*****	******	****	*********** *******
용역기간	********** ************	********** ************	********** ************	********** ************

ㅇ 건설사업관리기술자 배치계획(3차)

□ 조치 계획

ㅇ 상기 보고내용과 같이 건설사업관리기술자 투입 일정을 변경하고 전체 계약금액 내에서 3차 용역을 발주하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함

붙임 : 1. 건설사업관리단 설계변경 및 발주 검토서 1부.

2. 설계변경 및 발주 내역서 각 3부.  끝.