문서번호	토목부-36064
결재일자	2022. 12. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이상현		황윤기	12/09
			하현석
협조
	주무관		이회진

- 창동상계 동서간 연결교량 건설공사 건설폐기물처리용역 - 설계변경(1회) 검토 보고

- 창동상계 동서간 연결교량 건설공사 건설폐기물처리용역 -

설계변경(제 1회) 검토 보고

2022. 12.

도시기반시설본부

(토        목        부)

- 창동상계 동서간 연결교량 건설공사 건설폐기물처리용역 -

설계변경(제 1회) 검토 보고

「창동 상계 동서간 연결교량 건설공사 건설폐기물처리용역」과 관련하여 공사 진행에 따른 폐기물 처리물량 반영을 위해 설계변경을 시행하고자 함

※ 관련근거 : 설계변경 검토 보고(건설폐기물처리용역)-감리부-22-01971호(2022.12.07.)

□ 용역 개요

ㅇ 용 역 명 : 창동 상계 동서간 연결교량 건설공사 건설폐기물처리용역

ㅇ 용역기간 : '22.05.10. ∼ '24.04.30.

ㅇ 용 역 비 : ***********

ㅇ 용 역 사

- 수집 운반 : ***************

- 중간 처리 : ***************

□ 설계변경 내용

ㅇ 변경 사유

- 보행교 및 보차도교 공사에서 기 실정보고를 통해 설계변경한 사항 반영

→ 임시우회도로 설치, 수해복구, 가도 설치, 도수로 및 호안블럭 철거 등

ㅇ 변경(제 1회) 현황

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
도 급 액	***********	***********	**************
용역기간	************* ************	************ *************	*****

ㅇ 수량 증·감 현황

구 분	운 반(㎥)			처 리(ton)			비 고
	당 초	변 경	증·감	당 초	변 경	증·감
폐콘크리트	**	******	******	***	******	******
페아스콘	***	******	******	***	******	*******
혼합폐기물	***	*****	*****	***	*****	*****

ㅇ 감리단 검토 의견

- 건설폐기물 관리대장, 폐기물 인계내역서 및 건설폐기물 처리전표 등을 통해 실 반출량을 적정하게 반영하였고 공사 실정보고를 통해 추가되는 건설폐기물량을 적정하게 반영

□ 조치계획

ㅇ 건설사업관리단의 검토의견은 적정한 것으로 판단되며 건설폐기물처리용역에 대하여 설계변경 후 정산 하고자 함

붙임 : 1. 건설사업관리단 설계변경 검토의견서 1부.

2. 설계변경 내역서(1회) 1부.  끝.