문서번호	기전과-31960
결재일자	2022. 12. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이석희		12/12
		김은덕
협조

교통신호기 원인자부담공사 준공승인 검토 보고 「개포9단지 주택재건축정비사업 중 교통안전시설물 설치공사(신호)」

교통신호기 원인자부담공사 준공승인 검토 보고

「개포9단지 주택재건축정비사업 중 교통안전시설물 설치공사(신호)」

2022. 12. 12.

동부도로사업소

(기전과)

교통신호기 원인자부담공사 준공승인 검토 보고

개포9단지 주택재건축정비사업 중 교통안전시설물 설치공사(신호) 관련 원인자부담공사 준공승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		공사 개요

□ 공 사 명 : 개포9단지 주택재건축정비사업 중 교통안전시설물 설치공사(신호)

□ 공사위치 : 강남구 일원동 688

□ 공사기간 : *****************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	******* ***	********	********	********

Ⅱ		추진 경위

□ '22.09.05. : 원인자부담공사 승인 요청

□ '22.09.28. : 공사 승인

□ '22.10.27. : 원인자부담공사 준공승인 요청

□ '22.11.08. : 준공검사 시행

□ '22.12.05. : 지적사항 조치결과 확인

Ⅲ		준공검사 및 지적사항 조치

□ 검사결과

ㅇ 점검일시 : '22.11.08.(화) 10:00 ~

ㅇ 입 회 자 : *******************************************

ㅇ 지적사항 : 지주 점검구 불량, 제어기 내부 정리 미흡, 준공표찰 미부착

□ 조치결과

ㅇ 확인일시 : '22.12.05.(월) 14:00 ~

ㅇ 확 인 자 : ***************

ㅇ 확인결과 : 지적사항 조치완료(붙임8)

Ⅳ		준공승인 및 검토사항

□ 준공승인 내역

구 분	공 사 내 역				비 고
	품 명		규 격	수 량
신호	신호제어기	신설	표준형	1대
	차량신호등	신설	1면3색	5조
	디자인지주	신설	∅250mm X 8.5m	2본
	디자인지주	신설	∅125mm X 4m	3본
	신호맨홀	신설	800mm*800mm*800mm	7식
	보행신호등	이설	1면3색	3조

□ 검토사항

구 분	검 토 사 항	결 과	비 고
공통사항	승인도면과 시공상태 일치 여부	적 정
	교통안전시설 설치·관리 매뉴얼 설치기준 준수 등	적 정
	교통안전시설물관리시스템(T-GIS) 입력 확인	적 정

시설점검	전기안전점검(필증 및 점검표) 여부	적 정
	차량 및 보행등 정상 작동 상태 확인	적 정
	차량 및 보행등 지주 설치(수평) 상태 확인	적 정

Ⅴ		검토 의견

□ ***********에서 시행하는 개포9단지 주택재건축 정비사업 중 교통안전시설물 설치공사(신호) 관련 준공서류를 검토한 결과, 적정하므로 준공승인 처리하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 준공승인 요청 공문 1부.

2. 서울특별시경찰청 규제심의 공문

3. 준공내역서 1부.

4. 준공도면 1부.

5. 준공사진 1부.

6. 준공계 및 준공검사원 1부.

7. 준공감리조서 및 준공검사조서 1부.

8. 지적사항 조치결과 1부.

9. 기타사항 점검결과 1부.  끝.