문서번호	녹지관리과-26467
결재일자	2022. 12. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹지관리과장	공원부장
변동풍		代장창수	전결 12/12
			김상국
협조

「2022년 풍수해 위험(피해) 수목 정비공사」 설계변경 보고

공  원  부

(녹지관리과)

「2022년 풍수해 위험(피해) 수목 정비공사)」

설계변경 보고

2022년 풍수해 위험(피해) 수목 정비공사와 관련하여 다음과 같이 설계변경하고자 함.

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명: 2022년 풍수해 위험(피해) 수목 정비공사

ㅇ 공사기간: 2022.11.22.~2022.12.16.

ㅇ 도 급 액: *************

ㅇ 도 급 자: **************

□ 설계변경 내역

구분	현황 및 실정사항	설계변경 내용	비고
조경공사	******************************	*********** ********************* **************************** ******************** **************************** ******************** **************************** ******************** *************************** ******************** ***************************
	- ****************************************** *********************************	********* ******************* *********(증438주) ****************** *******(증94주) ******************* *******(증61주) ****************** ******(증1주) ***************** *****(증1주) ****************** ******(증13주) ****************** ******(증5주) ***************** *****(증2주) ****************** ******(증1주) ***************** *****(증2주) ***************** *****(감1주)
	************************************	**************** ********************* ***********(증25톤)
제경비	**************** **	************* ********************

□ 계약금액 변경

ㅇ 변경금액: 증22,663,580원

구분		금 액(원)		증△감	비고
		당초	변경
총공사비		163,221,760	185,885,340	22,663,580
도급비	공급가액	148,383,419	168,986,673	20,603,254
	부가가치세	14,839,341	16,898,667	2,060,326
	소계	163,221,760	185,885,340	22,663,580

ㅇ 예산과목: 재해 및 재난 예방, 재난 예방 및 복구, 응급복구(재난관리기금 재난계정), 시설비및부대비, 시설비

□ 공사기간 변경: 기간 변경 없음

□ 조치계획

ㅇ 위 사항과 같이 설계변경 및 계약금액을 변경계약의뢰하고자 함

붙임 1. 설계변경내역서 1부.

2. 제비율 검증확인서 1부.  끝.