문서번호	시설보수과-27212
결재일자	2022. 12. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
지종삼		이정국	12/12
			차창훈
협 조

대방천복개 외 1개소 보수공사 설계변경(정산) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 12.

남부도로사업소

(시설보수과)

설계변경(정산) 보고

(대방천복개 외 1개소 보수공사)

「대방천복개 외 1개소 보수공사」의 보수물량 변경 및 제비율 정산 등에 따른 설계변경(정산) 보고사항 임

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 대방천복개 외 1개소 보수공사

○ 공사기간 : 2022. 8. 12. ~ 2023. 2. 7.

○ 공사구간 : 대방천복개, 도림천4복개

○ 공사개요 : **************************************

○ 도 급 비 :****************

○ 시 공 사 : ㈜웅산건설산업 대표 김 규태

□ 설계변경 현황

○ 설계변경 사유 : 보수물량 실측에 따른 실정산 및 제비율 정산

○ 설계변경 내용

가) 아스팔트 재포장 및 신축이음장치 실측 물량 정산

나) 건강보험료 등 제비율 정산 등

주요변경내역	수 량		증·감	비고
	당초	변경
절삭후 덧씌우기	24.65a	24.60a	감 0.05a	대방천 복 개
교면방수	2279.94㎡	2,275.33㎡	감 4.61㎡
신축이음장치 설치	109.93m	124.03m	증 14.1m	도림천4 복 개

○ 사업비 변경내역

구 분	당 초	변 경	증·감
총공사비	1,429,066,400원	1,369,233,000원	감) 59,833,400원
도 급 비	1,288,546,400원	1,185,910,000원	감)102,636,400원
관 급 비	110,400,000원	148,530,000원	증) 38,130,000원
이 전 비	30,120,000원	34,793,000원	증) 4,673,000원

- 예산과목

‧ ****************************************************

************************************************************

□ 조치의견

○ 상기와 같이 물량증‧감으로 인한 공사비에 대하여 설계변경(정산)코자 함.

붙임 1) 설계변경 사유서 1부.

2) 설계변경 내역서 및 도면 각 1부.

3) 검증확인서 1부. 끝.