문서번호	기전과-26343
결재일자	2022. 12. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
강혜지		문준호	전결 12/12
			문동하
협 조

금호터널 외 1개소 자동제어시스템 제작구매설치

사고이월 검토 보고

2022. 12.

성동도로사업소

(기 전 과)

금호터널 외 1개소 자동제어시스템 제작구매설치

사고이월 검토 보고

금호터널 외 1개소 자동제어시스템 제작구매설치 사업의 조달계약 지연에 따라 연내 사업완료가 불가하여 사고이월을 통해 사업추진에 만전을 기하고자 함

1		관 련 근 거

ㅇ 2022 회계연도 예산사업 집행 철저 및 사고이월 제출 안내

(도로시설과-29901, 2022.12.06.)

2		사 업 개 요

ㅇ 사 업 명 : 금호터널 외 1개소 조명설비 자동제어시스템 제작구매설치

ㅇ 위    치 : 금호터널, 옥수터널

ㅇ 사업기간 : 2022. 12. 5. ~ 2023. 3. 5.

ㅇ 사 업 비 : ******

ㅇ 사업내용 : 조명설비 자동제어시스템 구축 및 시간동기화 장비 설치

3		추 진 현 황

ㅇ 2022. 08. 30. : 도로터널 자동제어시스템 개선사업 추진 요청

(도로시설과-25635호)

ㅇ 2022. 10. 06. : 사업 발주 계획 수립(기전과-24910호)

ㅇ 2022. 10. 17. : 예산 재배정 통보(도로시설과-27539호)

ㅇ 2022. 10. 19. : 조달계약 의뢰(기전과-25183호)

ㅇ 2022. 12. 02. : 낙찰자 선정 및 계약체결 안내(조달청 장비구매과-27662호)

ㅇ 2022. 12. 08. : 계약체결 알림(관리단속과-29978호)

4		사고이월 내역

ㅇ 사고이월 사유

- 22년 8월 말 사업추진 요청(도로시설과) 및 조달청 계약체결 지연에 따라 금년도 사업완료 불가

ㅇ 사고이월 내역

(단위 : 원)

구 분	재배정액	원인행위액	지출예정액(12월)	사고이월액
시설비	***********	***********	*********	***********

ㅇ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

5		조 치 의 견

ㅇ 상기와 같은 실정으로 원활한 사업추진 및 효율적인 예산 집행, 불용예산 최소화를 위해 사고이월 추진하고자 함

6		향 후 계 획

ㅇ 2022. 12. : 사고이월 요청(→ 도로시설과)

ㅇ 2023. 03. : 납품 설치 및 준공

붙임  1. 2022 회계연도 사고이월 요구서 1부.

2. 세부사업별 사고이월 제출자료 1부.  끝.