아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기 요청(서울바이오허브글로벌협력동 건립공사-목재덱)

1. 방재시설부-30460(2022.11.21.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 「서울바이오허브글로벌협력동 건립공사」에 소요되는 관급자재

(목재덱)에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

▢ 납품기한 연기 요청 내역

납품요구번호	품명 (규격)	납품기한		납품업체
		당초	변경
12-22-6-15569-00	목재덱(deck) (1500*90*t21mm, 이페)	2022. 12. 17.	2023. 5. 7.	주식회사 다정하이테크

▢ 변경사유: 선행공정이 늦어짐에 따라 조경자재 투입시기를 조정하고자 공사준공일까지 납품기한을 연장하고자 함.  끝.

	방 재 시 설 부 장
주무관	박용도		조경시설과장	오성훈		방재시설부장	12/13
이동훈
협조자
시행	방재시설부-31746	(	2022.12.13	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 14층 (무교동)	/	https://www.seoul.go.kr
전화	02-6438-2441	/전송	02-6438-2459	/	dydeh25@seoul.go.kr	/	대시민공개