문서번호	정수시설과-29255
결재일자	2022. 12. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	안전관리팀장	정수시설과장	암사아리수정수센터소장
박홍선	오광준	전훈	12/13
			김상동
협 조

설계변경(정산) 보고

(1정수장 여과지 환경개선공사)

2022. 12.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

설계변경(정산) 보고

(1정수장 여과지 환경개선공사)

1정수장 여과지 환경개선공사가 완료 됨에 따라 아래와 같이 설계변경(정산) 시행하고자 함.

1. 공사개요

□ 공사명: 1정수장 여과지 환경개선공사

□ 계약자: *****************

□ 공사기간: 2022. 7. 21.~2022. 12. 26.

□ 계약금액: ************

□ 공사개요

- 균열보수 19m              - 외부도장공 2,051㎡

- 유입수로 정비공 256개소

□ 예산과목

****************************************************************************

2. 설계변경(정산) 내용

□ 보수물량(정산)에 따른 물량 변경

연번	공 종	수 량		증감
		당 초	변 경
1	*****	***	******	********
2	******	******	******	******
3	******	*	***	*****
4	********	*****	*****	******
5	*******	*	******	********

- 여과지동 건물에 균열이 다수 진행되고 있어 균열보수 시행 2,190m

- 여과지동을 외부바닥 테두리에 설치된 방수턱이 본 건물과 틈이 많이 벌어져 여과지동 전체 방수턱 설치 공사 시행 98㎡

- 유입수로 정비는 당초 여과지동 전체 보수로 256개소 였으나 1계열 기 정비완료로 2, 3, 4계열 유입수로 정비시행 192개소

- 여과지동 내부에 설치된 난간이 부식되어 2, 3, 4계열 난간 도장 공사시행 1,880㎡

□ 보험료, 산업안전보건관리비 등 정산

□ 보수물량 변경에 따른 설계변경(정산) 금액

구 분	금 액(원)			비고
	당 초	변 경	증•감
총공사비	***********	***********	***********	**********
공급가액	***********	***********	***********
부 가 세	**********	**********	**********

3. 조치의견

□ 위와 같이 설계변경(정산) 시행하고자 하며 물량 정산에 따른 증액된 공사비 ************은 본부에서 미배정된 여과지동외 1 옥상방수공사(자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 정수센터 시설정비, 시설비및부대비, 시설비)예산을 활용하고 자 함.

□ 본부 설계변경 심사 요청 후 설계변경 시행 및 계약의뢰(행정관리과)

붙임  1. 설계변경 검토 보고

2. 설계변경(정산) 내역서 등 1부.

3. 제경비 검증확인서 1부.

4. 산업안전보건관리비 정산 검증확인서 1부.

5. 보험료 등 정산서 각 1부.  끝.