문서번호	정수시설과-29253
결재일자	2022. 12. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	안전관리팀장	정수시설과장	암사아리수정수센터소장
박홍선	오광준	전훈	12/13
			김상동
협 조

설계변경 검토 보고

(1정수장 여과지 환경개선공사)

2022. 12.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

설계변경 검토 보고

(1정수장 여과지 환경개선공사)

1정수장 여과지 환경개선공사 시행 중 현장 여건 반영에 따른 설계변경 사유가 발생하여 검토 보고 드림.

□ 공사현황

□ 공사명: ****************

□ 공사개요: **************************************

□ 공사기간: ***************************

□ 계약금액: ************

□ 계약자: **************

□ 관련 근거

□ 실정보고서 제출(22-12-12-010 2022. 12. 12.)

- 현장여건에 따른 추가공종 반영

(방수턱 ․ 유입수로 덮개, 내부난간 ․ 중앙통로 ․ 계단 도장 추가)

- 공사시행에 따른 시공물량 증감 반영

(콘트리트 균열보수, 외부도장공, 유입수로 해체 및 설치, 시스템 비계

설치 및 해체)

□ 보고내용

□ 변경내용 및 사유

연번	공종	변경내용 및 사유	증감액(원)
1	콘크리트 균열보수	○ 주입보수 물량 증가******* 그라인딩 작업 후 확인된 균열이 당초 설계 물량보다 다수 확인되어 추가 시공 필요	***********

연번	공종	변경내용 및 사유	증감액(원)
2	외부 도장공	○ 도장 증가***** 당초 설계물량보다 시공물량 증가로 설계 변경 반영 필요	***********
3	방수턱 설치	○ 방수턱 설치 신규공종****** 외부 방수턱이 건축물과 분리 및 노후되어 추가 충진작업 시행 필요	**********
4	유입수로 해체 및 설치	○ 유입수로 설치 감소 **** 여과지 1계열 유입수로가 기정비로 금번 보수물량에서 제외	***********
5	유입수로 FRP 덮개 설치	○ 유입수로 FRP 덮개설치 신규공종***** 여과지 2,3,4계열 유입수로 측면 철재물 부식으로 덮개 제작설치 필요	***********
6	시스템비계 설치 및 해체(임대)	○ 비계 물량 증가 **** 당초 설계물량보다 시공물량 증가로 설계 변경 반영 필요(외부 도장공 물량과 동일)	***********
7	여과지 내부 난간 도장	○ 난간도장 신규공종******* 2, 3, 4계열 여과지 내부 난간이 부식으로 도장공사 추가 필요	***********
8	여과지 외부 출입 계단 및 중앙통로 도장	○ 난간도장 신규공종 ****** 1정수장 여과지 외부출입계단 및 중앙통로 노후로 도장 필요	***********

□ 현장 실정 사진

콘크리트 균열 보수	외부 도장	방수턱 설치	유입수로 해체 및 설치
유입수로 FRP덮게 설치	시스템 비계 설치	여과지 내부 난간 도장	여과지 중앙통로 도장

□ 도급비 변경

구분	당초	변경	증
도급비	***********	***********	***********

□ 조치계획

□ 상기 변경 사항에 따라 제경비(보험료, 수수료, 산업안전보건관리비 등) 정산하여 설계변경 시행

□ 증액된 공사비 ************은 본부에서 미배정된 여과지동외 1 옥상방수공사 예산 활용

붙임  1. 설계변경 내역서, 물량집계표 각 1부.

2. 실정 보고서.  끝.