문서번호	도로보수과-29433
결재일자	2022. 12. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	강서도로사업소장
최선보	代주영진	12/13
		김용제

「2022년 노후포장도로정비 강서1구역 노면표시공사」

설계변경 검토 보고(제1회-최종)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.  12.

강서도로사업소

도로보수과

「2022년 노후포장도로정비 강서1구역 노면표시공사」

설계변경 검토 보고(제1회-최종)

우리 사업소에서 시행하는『노후포장 도로정비 강서1구역 노면표시공사』에 대하여 감리사부터 설계변경 검토서가 접수되어 아래와 같이 설계변경사항을 검토하여 보고 드림

※ 관련문서 : 제1회(최종) 설계변경 검토보고〔㈜건양 22-527(2022.12.10.)〕

1		공사개요

❍ 공 사 명 : 노후포장도로정비 강서1구역 노면표시공사

❍ 공사규모 : 차선도색 149,120m

❍ 공사기간 : 2022.05.31. ~ 2022.12.15.

❍ 공 사 비 : 549,848천원

- 도급비 485,868천원, 관급비 22,770천원, 이전비 41,210천원)

❍ 도 급 자 : ㈜건영이앤씨 대표 박지명

❍ 감 리 사 : ㈜건양엔지니어링 대표 김종문

❍ 예산과목 : 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노면표시

유지관리사업, 시설비및시설부대비, 시설비

2		설계변경사항

❍ 공사물량 조정에 따른 노면표시 공사물량 증감

❍ 산재보험료, 고용보험료 건강보험료 등 7개 항목 제경비 정산

❍ 주요 변경내역

구 분	단위	당 초	변 경	비 고
****	*	*******	*******	*********
*******	**	*	*	*********
*******	**	*	*	*********

❍ 공사비 증감 내역                                    (단위: 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
총공사비	***********	***********	************
도 급 비	***********	************	************
관급자재비	**********	**********	*************
이 전 비	**********	**********	*

3		조치계획

❍ 상기 보고내용과 같이 차선도색 실제 시공량을 반영하여 설계변경 후 감리사 통보 및 변경계약과 준공처리하고자 함.

붙임: 1. 설계(변경)내역서 및 제비율 검증확인서  각1부. 끝