문서번호	설비부-34319
결재일자	2022. 12. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		설비총괄과장	설비부장
허진		장병선	12/13
			김중영
협 조

『강남순환도시고속도로(8공구) 구룡지하차도 전기공사』

설계변경 자문결과 및 준공정산 검토보고

2022. 12.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『강남순환도시고속도로(8공구) 구룡지하차도 전기공사』

설계변경 자문결과 및 준공정산 검토보고

우리본부에서 시행중인『강남순환도시고속도로(8공구) 구룡지하차도 전기공사』관련,  설계변경 소위원회 자문결과 및 준공정산을 검토하고 보고드림

▸ 소위원회 요청: *************************************************

▸ 자문회의 결과: ******************************************

▸ 준공정산 결과: ****************************************************

*************************************

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 구룡지하차도 전기공사

❍ 위    치 : 서초구 양재동 구룡지하차도 일대

❍ 사업기간 : 2012.08.02. ~ 2022.12.31.

❍ 사 업 비 : **************************************

❍ 공사내용 : 구룡지하차도 L=770m - 550kVA(특고압), LED터널등 526개 등

❍ 시 공 사 : **********************

❍ 공 정 률 : 전기 95% / 주공정 98%

❍ 계약현황                                           (단위 : 원)

구분	계약금액	준공(기성)금액	공사기간	비고
총차	*************	*************	*************************
1차	**********	**********	********************	**
2차	***********	***********	********************	**
3차	***********	***********	********************	**
4차	***********	***********	********************	**
5차	***********	***********	********************	**
6차	**********		********************	**

Ⅱ		설계변경 내용

□ 관련근거

❍ 실정보고 사항 검토보고 (설비부-32981, `22.11.28.)

- 설계변경 ********** → 증감액 5천만원 이상으로 설계변경 소위원회 상정

❍ 설계변경 자문위원회 결과보고(15,16,17차) (설비부-33929, `22.12.08.)

❍ 설계변경 소위원회 자문결과 조치보고 및 설계변경 검토 (동기강2022-358, `22.12.09.)

□ 설계변경 주요내용

❍ 구룡지하차도 상부 교통신호설비 선로 지중화 공사

- 서울시 규정 교통신호 디자인지주 반영(5개소)

- 교통안전시설 케이블·관로 지중화(원인자복구 및 관리청복구 굴착공사)

❍ 전기요금, 도로복구 원인자부담금 대납분 지급(********************)

***************************************************

□ 설계변경 소위원회 자문회의 결과 (조건부 가결)

❍ 지적사항 15건 조치 완료, 지적사항 4건에서 금액증감 발생

연번	지적분야	내 용	증,감
1	내역서	보조등 철거물량 중복내용 수정 및 잡재료비 일괄 2% 적용	*********
2	일위대가	기존 일위대가와 동일품목, 규격 건인 신규 일위대가는 기존 대가로 적용 (맨홀, 케이블 등)	************
3	단가산출	실정보고, 공사 시점과 동일한 시기의 노임단가 적용	***********
4	추가 반영	원인자공사 승인조건의 신호지주 불법광고물 부착방지시설 적용	**********
합 계 (직접비 기준)			*********

❍ 자문회의 결과 *******************)

자문안건	자문요청금액 (A)	절감액 (B)	최종반영 (C=A-B)
구룡지하차도 상부 교통신호설비 지중화	*************	**********	*************

□ 설계변경 현황 (총차 및 6차)

※ 보험료 정산, 전 차수 설계변경 시 기정산-기감액처리 / 대납분 반영(증액)

구분	금 액(원)			비 고
	당초	변경	증,감
총 차	*************	*************	************	***** ***********
6 차	**********	***********	************

❍ 변경내역 (총차)

구 분	금 액 (원)
	당 초	변 경	증,감	비고
직접공사비	*************	*************	**********
간접공사비	**********	**********	*********
제경비	***********	***********	*********
일반관리비	**********	**********	*********
이 윤	**********	**********	*******
신호등 고재처리	*	***********	**********
사인보드카비용	*********	*********	*
신호수비용	*********	*********	*
안전관리자 선임비용	*	**********	**********	*****
설계용역비	*	**********	**********
전기요금 대납	*	*********	*********	******
도로복구 원인자부담금 대납	*	**********	**********
부가세	***********	***********	**********
안전관리자 선임비용	**********	*	***********
설계용역비	**********	*	***********
합 계	*************	*************	**********

❍ 변경내역 (6차)

구 분	금 액 (원)
	당 초	변 경	증,감	비고
직접공사비	**********	**********	**********
간접공사비	*******	*********	*********
제경비	*********	*********	*********
일반관리비	*******	*********	*********
이 윤	*******	*********	*******
신호등 고재처리		**********	**********
전기요금 대납		*********	*********	******
도로복구 원인자부담금 대납		**********	**********
부가세	*********	*********	*********
합 계	**********	***********	**********

Ⅲ		검토의견 및 향후계획

□ 감리단 검토의견

❍ 설계변경 자문회의(소위원회) 자문의견을 검토한 결과 지적사항에 대한
조치결과 수량 및 공사금액이 적정하게 산출되었으며, ***************

❍ 공공요금 및 도로복구 원인자부담금 대납분을 포함하여 총차 14회 및
6차1회 설계변경에 반영함이 타당함

□ 보고자 검토의견

❍ 건설사업관리기술자의 설계변경 기술검토의견 사항을 검토한 결과
설계변경 소위원회 자문내용 반영 및 준공정산(공공요금 등 대납분 정산) 내용이 적정한 것으로 판단됨

❍ 또한 계약금액조정시스템 확인 결과 제경비 적용도 적정하여 총무부에 변경계약을 의뢰코자 함

□ 향후 계획

❍  `22.12. : 계약변경 의뢰 및 공사 준공

붙 임 1. 설계변경 자문위원회 결과보고 1부.

2. 자문회의 지적사항 조치결과 및 검토의견서 1부.

3. 변경내역서 각 1부.

4. 제비율 검증확인서 1부.

5. 산업안전관리비 내역(총괄) 1부.  끝.