문서번호	기전과-32040
결재일자	2022. 12. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
진수경		12/13
		김은덕
협 조

「2022년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)」

작업지시(4차 추가 및 변경) 계획 보고(수정)

2022. 12. 13.(화)

동부도로사업소

(기전과)

「2022년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)」

작업지시(4차 추가 및 변경) 계획 보고(수정)

관내 교통안전표지의 유지관리 및 경찰청 규제사항 이행을 위하여

작업지시(4차 추가 및 변경)하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

1		교통안전표지 설치 현황

2022. 1. 1. 기준

구분	교통안전표지(개)						비고
	계	주의표지	규제표지	지시표지	보조표지	기 타
합계	******	***	*****	*****	*****	*****
강남구	*****	***	*****	*****	*****	***
서초구	***	**	***	***	***	**
송파구	*****	***	*****	*****	*****	***
강동구	*****	***	*****	*****	*****	***

2		사업개요

□ 사 업 명: 2022년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)

□ 사업내용: 강남구, 송파구, 강동구, 서초구 일부 교통안전표지 유지보수

□ 사업기간: 2022. 4. 5. ~ 2022. 12. 31.

□ 계 약 자: 삼정유리샷시(주) 대표 오주석

□ 계약금액: 금94,947,110원

□ 감리업체: 주식회사 도시연구 대표 김윤주

3		작업지시 계획

□ 작업차수: 작업지시 4차 추가

□ 작업기간: 작업지시일로부터 ~ 2022. 12. 19.(월)

□ 작업지시 금액: ************

□ 작업지시 내역

연번	관련근거	작업위치	작업내용	비고
1	응답소********6900707	종합운동장 사거리	#311 #407 중형2(신호기) 신설
2	응답소 20220816900684	길동 467	#322 중형1(가로등) 교체
3	유선민원 *************(8.15.)	천호역 10번출구	#308 장애물표적표지 중형1(정주식) 교체
4	경정비 순찰	오금동 128-3	#329 중형1(신호기) 교체
5	경정비 순찰	오금동 120-16	페퍼폴 철거, 교차로대 신설
6	경정비 순찰	잠실동 127	페퍼폴 철거, 교차로대 신설
7	강동구 도로과-17762(2022.8.3.)	구천면로	#224 중형1(가로등) 교체 2매 #218 #428 중형1(가로등) 교체
8	교통관리과-18302(2022.08.01.)	로뎀빌딩앞	#311 #407 중형2(신호기) 신설
9	송파서교통과-11848(2022.8.18.)	KT앞삼거리	교차로대 이설
10	교통관리과-27006(2021.11.30.)	천동초교 삼거리	#125 #422 중형2(신호기) 신설
11	교통관리과-21660(2020.10.26.)	석촌동 225	#329 중형1(신호기) 신설 4매
12	교통관리과-24220(2021.11.1.)	고덕현대아파트	#322 중형2(신호기) 신설
13	교통관리과-4502(2021.3.8.)	파인타운3단지	#329 중형1(신호기) 신설 2매
14	교통관리과-27006(2021.11.30.)	연세치과	#329 중형1(신호기) 신설 2매
15	교통관리과-22053(2021.10.8.)	강일중학교	#329 중형1(신호기) 신설 2매	횡단 보도 확충
16	교통관리과-6988(2021.4.6.)	신명초교입구	#329 중형1(신호기) 이설 2매
17	교통관리과-14265(2021.7.1.)	미성아파트앞	보조표지 이설 2매
18	교통관리과-14265(2021.7.1.)	백제고분	보조표지 이설 4매 #311 #407 중형2(신호기) 신설
19	교통관리과-25793(2021.11.17.)	오금현대1차아파트	보조표지 이설 6매 #329 중형1(신호기) 이설 2매
20	교통관리과-14463(2022.6.21.)	위례성대로 남2문	#311 #407 중형2(신호기) 신설 및 철거 2set #224 #313 장애물표적표지 중형1(정주식) 신설 #307 #407 중형2(신호기) 철거 2set	소통 개선
21	교통관리과-4421(2022.3.3.)	천호동교차로	보조표지 중형2(신호기) 신설 4매	사고 잦은곳
22	교통관리과-4421(2022.3.3.)	경복아파트앞	#224 #311 #407 보조표지 중형2 (신호기) 이설 2set #224 보조표지 중형1(가로등) 신설 3set #228 중형1(정주식) 신설
23	교통관리과-4421(2022.3.3.)	포스코사거리	#313 장애물표적표지 중형1(정주식)철거 #311 #407 중형2(신호기) 철거 보조표지 중형1 교차로대 철거 #311 #407 중형2(신호기) 신설 #315 중형2(가로등) 교차로대 신설 보조표지 중형1(신호기) 교차로대 신설 #224 중형2(신호기) 이설 3매 #228 중형1(신호기) 이설 #311 #407 중형2(신호기) 이설 보조표지 중형1(신호기) 교차로대 이설 보조표지 중형2(신호기) 이설 2매
24	교통관리과-4421(2022.3.3.)	둔촌고교입구	장애물표적표지(정주식) 철거 #308 장애물표적표지(정주식) 신설 2set
25	교통관리과-4421(2022.3.3.)	동남로 563	#224 중형2(신호기) 신설 #219 #428 중형1(가로등) 신설	사고 잦은곳
			장애물표적표지(정주식) 철거 #313 장애물표적표지(정주식) 신설 #218 #428 중형1(가로등) 신설
			#219 중형1(가로등) 철거 2매 #218 중형1(가로등) 교체 2매
			#219 중형1(가로등) 철거 2매 #218 #428 중형1(가로등) 신설 3set
26	교통관리과-4421(2022.3.3.)	올림픽공원 북2문	#311 #407 중형2(신호기) 철거 2set #224 #427 #325 #313 장애물표적표지 중형1(신호기) 이설 보조표지 #317 중형1 교차로대 이설 #313 장애물표적표지 중형1(신호기) 신설 3set #224 #311 #407 중형2(신호기) 신설 #311 #407 중형1(신호기) 신설 2set
27	1구역 연간단가 작업지시	강남세브란스 연등	#317 중형1(신호기) 교체 2매 #325 중형1(신호기) 교체
28	경정비순찰(9.22.)	세곡삼거리	#312 장애물표적표지 중형1(정주식) 교체
29	교통관리과-11271(2021.5.28.)	한미약국	#329 중형1(신호기) 신설 4매
30	교통관리과-15173(2022.6.28.)	포스코사거리	#407 중형1(신호기) 교체 2매
31	교통관리과-5384(2022.3.15.)	잠실대교 남단	#125 #401 중형1(가로등) 신설
32	교통관리과-8199(2022.4.14.)	대치우성아파트	#407 중형1(정주식) 교체 2매
33	교통관리과-17687(2022.7.25.)	역삼동 830-25	#214 중형2(신호기) 신설 2매
34	교통관리과-18813(2022.8.4.)	고덕로25 ~올림픽로833	#329 중형1(신호기) 교체 2매 #212 #405 #211 중형1(철주) 교체 #211 #405 중형1(철주) 교체 #405 중형1(신호기) 교체 #212 #405 중형2(신호기) 교체 #213 #405 중형2(신호기) 교체 #214 #405 중형2(신호기) 교체 #307 #405 중형2(신호기) 교체	취소분 구청에서 기완료
35	응답소********8806545	언주로608	#227 #226 중형1(정주식) 지주 교체
36	강동구청 02-3425-5073(11.7.)	구천면로 304	#218 #428 중형1(가로등) 신설
37	교통관리과-26050(2022.10.20.)	강남수도사업소	#329 중형1(신호기) 신설
37	교통관리과-27390(2022.11.2.)	위례성대로	#224 중형1(가로등) 교체 8매 #224 중형2(신호기) 교체 19매 #427 중형1(가로등) 신설 1매 #427 중형2(신호기) 신설 3매	제한 속도 조정
		밤고개로	#224 중형1(가로등) 신설 3매, 교체 24매 철거 1매 #224 중형2(신호기) 교체 18매, 철거 1매 #427 중형1(가로등) 신설 2매, 철거 1매 #427 중형2(신호기) 철거 1매 #224 발광형 신설 3매, 철거 3매
		양재대로	#224 중형2(신호기) 신설 1매, 교체 6매, 철거 1매 #427 중형2(신호기) 신설 2매
39	응답소********1900449	대곡교입구	#302 #321 중형1(교차로대) 교체	추가분
40	경정비순찰(11.22.)	구리암사대교남단	#322 중형1(정주식) 교체	추가분
41	응답소********8806393	삼성동 117	#218 보조표지 중형1(정주식) 교체	추가분
42	경찰청 02-700-5243 유선민원	오륜사거리	#224 #427 중형2(신호기) 이설	추가분
43	송파서교통과-20709(2022.12.6.)	가락시장사거리	#309의2 #407 중형2(신호기) 철거 #311 #407 중형2(신호기) 신설	추가분
44	1구역 연간단가 3차작업지시	청담건영아파트	#129 #322 중형1(신호기) 교체	추가분
45	1구역 연간단가 3차작업지시	강남세브란스	보조표지 중형2(신호기) 교체	추가분

□ 작업완료보고서 제출기한 : 2022. 12. 19.(월)

□ 작업지시 내용을 2022년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가) 시공업체 및 감리업체에 발송하여 기한 내 완료토록 지시

4		보고자 의견

□ 시공물량은 작업완료 보고서에 따라 설계변경 및 정산처리

붙임  1. 작업지시(4차 추가) 설계내역서 1부.

2. 설계도면(별도) 1부.  끝.