【별지 제7호서식】

설계변경 심사요청서

(1정수장 여과지 환경개선공사)

부분공개(5)

시 행	정수시설과-29256
시행일자	2022.12.13
수 신 자	서울특별시상수도사업본부장(안전조사과장)
접수번호
접수일자

주무관		정수시설과장				결재
박홍선		12/13
		전훈
협 조

공 사 명	1정수장 여과지 환경개선공사		요청기관		암사아리수정수센터 (정수시설과)
공사위치	암사아리수정수센터 1정수장 여과지
공사기간	2022. 7. 22.~12. 26.		입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)
계약금액 (최초계약 금액)	(당초) 도급비: 491,781,300원			(변경) 도급비: 679,030,000원
예산내역	세부 사업명	예산과목					예산액(천원)
	1정수장 여과지 환경개선공사	자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 정수센터 시설정비, 시설비및부대비, 시설비					491,781
	여과지동 외 1 옥상방수공사	자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 정수센터 시설정비, 시설비및부대비, 시설비					187,249
공사개요	균열보수(2,190m), 외부도장공(2,874㎡), 방수턱설치(98㎡) 유입수로 정비공(192개소), 내부난간도장(1,880㎡)
설 계 자	·상호: 암사아리수정수센터 대표자: 김상동 ·책임기술자: 박홍선(전화번호: 3146-5768)
발 주 자	·담당자: 박홍선(전화번호: 3146-5768)
◦ 설계변경 사유(구체적으로 서술) - 물량 증감 발생 균열보수(2,171m)·외부도장공(823㎡) 물량증가, 유입수로정비공 64개소 물량감소 - 신규공종 발생 방수턱 설치(98㎡), 내부난간도장(1,880㎡)
◦ 첨부서류 1. 설계도서 각 1부(설계변경내역서, 도면, 시방서, 단가산출서, 수량산출서) 2. 그 밖에 심사에 필요한 서류