아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	실정보고에 따른 검토결과 회신(홍익병원~목동역 장기사용 송배수관 정비공사)

1. 공사감독2처-15387(2022.12.9.)호 관련입니다.

2. 「홍익병원교차로~목동역교차로간 장기사용 송배수관 정비공사」에 따른 공사현장 실정과 관련하여 검토결과 아래와 같이 승인하오니 공사시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

아     래-

실정보고내용	시설공단 검토내용	사업소 검토의견
- 수계전환 작업완료를 통보받고, 즉시 공사계획을 수립하여 일부구간은 완료하였으나, 잔여구간 굴착통제로 인하여 굴착불가하며, 기온하락으로 노면이 얼기 때문에 교통안전사고 위험으로 포장업체일정협의가 불가한 실정임.	- 유관기관 허가 및 포장업체 일정협의가 없다면 공사가 불가하므로, 유관기관(구청, 도로사업소, 경찰서)와 포장업체 협의 후 공사시행이 타당함.	- 수계전환 완료기간 22.11.18.(금)부터 작업시행하였으나, 기온락에 따른 교통안전사고 위험 및 굴착통제로 인하여 잔여공정에 대해 유관기관 협의결과 포장일정지연불가 및 도로굴착통제로 인하여 잔여공정 제외하며, 추후 설계변경 시 반영토록 함.

끝.

	강서수도사업소장
주무관	김동건		급수관리팀장	김영환		급수운영과장	12/13
代이연창
협조자
시행	급수운영과-38261	(	2022.12.13	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3964	/전송	02-3146-3989	/	ehdrjs7378@seoul.go.kr	/	부분공개(6)