문서번호	치수과-23883
결재일자	2022.12.13
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		하수계획팀장		치수과장	안전건설교통국장
박철홍		代박철홍		민병기	12/13
					신용철
협조
	재무과장		김영규
	계약팀장		홍혜영

설계변경(1회) 및 계약기한 연기 계획(행당-5 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역 2차)

「행당-5 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역 2차」

설계변경([1회(총차 2회)] 및 계약기한 연기 계획

2022. 12.

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [√] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [ ] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [ ] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [ ] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [√]( 시비, 공기업하수도사업특별회계 ) 무 [√]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
구민의견 수렴		●	방법	:	설문조사 [ ] 만족도 조사 [ ] 찬반투표 [ ] 기타 [ ]
		●	시기	:	시행 전 [ ] 시행 중 [ ] 시행 후 [ ]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [√]
	● 홍 보 제 목:
	● 중점 홍보사항
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

「행당-5 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역 2차」

설계변경[1회(총차 2회)] 및 계약기한 연기 계획

방재성능목표 상향 방침 수립에 따라 『행당-5 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역 2차』의 설계변경 및 계약기한 연기를 시행하고자 함

□ 추진근거

○『소구역 하수관로 정비사업』 설계빈도 상향추진 등 업무처리 철저요청

[서울특별시장 제193호, 물재생계획과-30794(2022.11.2.)]

□ 용역개요

○ 용 역 명: 행당-5 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역 2차

○ 기    간: 2022.1.4.(착수 1.4.)~2022.12.29.

○ 위    치: 행당-5 소구역(응봉동 일대)

○ 내    용: 하수관로 정비 기본 및 실시설계

○ 도 급 비: 195,683천원(총차 363,683천원)

○ 용 역 사: ㈜화신엔지니어링 대표 최기영 외 1개사

□ 보고내용

○ 방재성능목표(설계빈도) 상향에 따른 설계변경 시행

- 소구역 하수관로 정비사업 설계빈도 상향(간선 50년, 지선 30년)

- 과업대상 물량 증가(약 0.5km)

○ 설계안정성 평가 반영

- 건설기술진흥법 시행령 제98조에 의거 의무 반영

○ 계약기한 연기(과업기간 연장)

- 설계빈도 상향에 따른 과업수행 추가 소요기간 필요

- (당초)'22.12.29. → '23.3.29.(3개월 연기, 용역사 귀책사유 해당없음)

○ 변경 용역비

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 ㆍ 감
총용역비	195,683,000 (총차 363,683,000원)	228,371,000 (총차 396,371,000)	증 32,688,000
도 급 비	195,683,000	226,171,000	증 30,488,000
이 전 비	0	2,200,000	증 2,200,000

○ 변경 과업 물량

공 종	단위	수 량		비 고
		당초	변경
기본 및 실시설계	km	4.3	4.8	설계연장 0.5km 증가
설계안정성검토	식	-	1	신규반영

□ 향후계획

○ 변경계약(계약금액, 계약기한) 요청

○ 2022년 미집행 잔여예산 사고이월 추진

○ 제2차 자문회의 개최('23.1.)

○ 용역 완성('23.3.)

붙임  1. 관련공문(설계빈도 상향추진) 1부.

2. 일상감사의견서 1부.

3. 변경내역서 1부.  끝.