문서번호	도시계획과-21188		주무관		캠퍼스타운조성담당	도시계획과장		도시관리국장
결재일자	2022. 12. 13.		남창림		곽춘호	이남수		12/13
공개여부	부분공개(5)							이창구
방침번호			협조
방침번호
				예산담당			정영임

「안암동 문화가로 및 안전거리조성사업」

사고이월 계획보고

2022. 12.

도시관리국

도시계획과

「안암동 문화가로 및 안전거리 조성사업」

사고이월 계획보고

안암동 도시재생활성화 사업의 일환인 「안암동 문화가로 및 안전거리 조성사업」 추진과 관련하여 회계연도 내 지출하지 못한 예산에 대해 사고이월하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 「지방재정법」제50조(세출예산의 이월)

○ 「서울특별시 성북구 재무회계 규칙」제17조(이월예산의 집행)

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 안암동 문화가로 및 안전거리 조성사업

○ 사업기간 : 2021.09. ~ 2023.06.

○ 사업내용 : 지역연계축제공간 및 범죄예방환경 조성

○ 총사업비 : 2,519,760천원(국 1,052,060 시1,467,700)

○ 추진현황 : 기본 및 실시설계용역 중

- 2021.10. 계획수립 및 기술용역 타당성 심사

- 2021.11. 건설기술심의 및 입찰공고

- 2022.02. 제안서 평가위원회 심의

- 2022.03. 기본 및 실시설계용역 착수 및 착수보고회

- 2022.08. 중간보고회

- 2022.09. 보도확장 시범사업

- 2022.11. 교통규제 심의

- 2022.12. 계약심사, 최종보고회, 공사발주

□ 사고이월계획

○ 예산현황

(단위 : 천원)

통계목	예산현액	원인행위액	지출액	사고이월액	집행잔액
시설비	887,060	240,000	192,000	695,060	0

○ 이월사유 : 계약종료기간(2022.03.14.~2023.02.28.) 미도래 및 지출원인행위를 위한 입찰공고 추진 중

○ 예산과목 : 도시계획과, 성장도시 발전기반 구축, 효율적인 도시개발 계획 및 관리, 2021년 안암동 캠퍼스타운 도시재생활성화 사업, 시설비 및 부대비, 시설비(명시이월)

□ 향후일정

○ 2023.2. 용역 완수

○ 2023.3. 공사 착공

○ 2023.6. 공사 준공

붙임  1. 사고이월 요구서 1부.

2. 사고이월사업별 명세서 1부.

3. 원인행위 미필사유서 1부.  끝.