문서번호	도로과-31381
결재일자	2022.12.13
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		보도관리팀장	도로과장		건설교통국장
곽미숙		최덕환	최강윤		12/13
					장병조
협 조
						기획경제국장		권병식
						재무과장		이성수
						계약심사팀장		代오승우
						계약팀장		심은진

	강동을 새롭게, 구민을 신나게!

「구천면로 노후보도 정비공사(2권역)」

설계 변경 시행 계획

2022. 12. 12.

건설교통국

(도 로 과)

「구천면로 노후보도 정비공사(2권역)」

설계 변경 시행 계획

우리구가 시행하고 있는「구천면로 노후보도 정비공사(2권역)」와 관련하여 신규 공종 및 실 시공 작업 물량 등을 반영하여 설계 변경을 시행하고자 함

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 구천면로 노후보도 정비공사(2권역)

❍ 구    간 : 천호초교입구 교차로~천호시장 교차로

❍ 규    모 : 연장 1,000m, 보도 폭 1.2~3.0m, 왕복 2차선

❍ 공사기간 : 2021. 10. 27. ~ 2022. 12. 31.

❍ 총공사비 : 1,709,661천원

- 도급비 1,047,123천원  관급비 473,134천원  이전비 189,404천원

❍ 계약업체 : 주식회사 우베조스(대표 : 최진우)

Ⅱ		설계 변경 사항

❍ 설계 변경 사유

- 공사현장 실정보고에 따른 검토보고(도로과-8310, 2022.4.18.)

‣ 야간 공사 시행

·구천면로는 보도폭이 협소하고 차량 통행이 많은 2차선 도로로 주간 공사 시 보행자 불편 초래 및 극심한 교통 혼잡이 발생되며 인근 상가의 영업 손실 우려에 따른 야간공사 시행 요청

‣ 신규 공종 발생

·본 사업은 구천면로 지중화사업과 연계하여 시행하는 공사로, 잦은 굴착 및           포장의 노후화로 도로 평탄성이 불량하여 아스콘 표층 전폭포장 정비 필요

‣ 중복설계구간 제외

·노후보도공사(제2권역) 구간중 「노후 하수관로 개량공사」구간과 당초 설계시 중복 반영된 시공 물량 조정(제외)

❍ 주요 공종 변경

공 종		단위	당초	변경	증감	비고
잔토처리(현장-집하장, 3.2km)	BH0.7㎥,15D.T	㎥	156	-	감)156
잔토처리(현장-집하장, 3.2km)-야간	BH0.7㎥,15D.T	㎥	-	618	증)618
잔토처리(집하장-매립지,59.4km)	BH0.7㎥,24D.T	㎥	156	618	증)462
레미콘타설	무근,장비운반	㎥	779	-	감)779
콘크리트타설(인력비빔)-야간	무근3종	㎥	-	132	증)132
콘크리트타설(기계비빔)-야간	무근	㎥	-	466	증)466
보차도경계석설치(직선)-주간	200*250*1000	m	1,147	-	감),1147
보차도 경계석설치(직선)-야간	200*250*1000	m	-	825	증)825
아스팔트절삭 후 포장-야간	B-Type(시공구간 단절로 인한 장비운반 발생 X), 시공량 ,3400㎡	a	-	95.65	증)95.65
화강석판석(보도용) t=5cm	t=5cm	a	33.48	26.77	감)6.71
디자인휀스 철거 및 재설치	B=2.0, H=1.2	경관	-	106	증)106
가로수보호판설치	1200*1000*100	조	-	22	증)22

❍ 공사비 증감 현황

(단위 : 원)

품 목	당초 금액	변경 금액	증·감
총공사비	1,709,661,620	1,759,263,000	증)49,601,380
도 급 비	1,047,123,620	1,277,700,000	증)230,576,380
관 급 비	473,134,000	422,525,000	감)50,609,000
이 전 비	189,404,000	59,038,000	감)130,366,000

Ⅲ		조치계획

❍ 상기 보고내용과 같이 공종별 시공물량 증감사항 및 신규공종 등을 반영하여 설계변경심의위원회 심의 상정 및 일상감사 의뢰 후, 그 결과를 반영하여 설계변경(최종) 시행 후 정산 처리코자 함.

Ⅳ		행정사항

❍ 예산과목 : 도로과, 도로건설 및 도로시설물 구축, 도로기능 유지관리, 구천면로 노후보도 정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 계약금액 조정 검증서 1부.

3. 실정보고 1부.  끝.