문서번호	도로관리과-33867
결재일자	2022. 12. 12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로관리팀장	도로관리과장
손창수		윤인식	12/12
			이정화
협조

「염수분사장치(고갯길, 지하차도 진출입부 제설작업) 구매」 계약변경 및 낙찰차액 사용 검토 보고

「염수분사장치(고갯길, 지하차도 진출입부 제설작업) 구매」

계약변경 및 낙찰차액 사용 검토 보고

2022. 12.

안전총괄실

(도로관리과)

「염수분사장치(고갯길, 지하차도 진출입부 제설작업) 구매」

계약변경 및 낙찰차액 사용 검토 보고

겨울철 강설 시 제설취약구간 제설작업을 위한 "염수분사장치 구매"건의 계약변경(계약금액, 납품기한) 및 낙찰차액 사용 검토 보고임

□ 사업개요

ㅇ 계 약 명 : 염수분사장치(고갯길, 지하차도 진출입부 제설작업) 구매

ㅇ 계약수량 : 본체 7조, 살수기(배관) 100대

ㅇ 계약금액 : 845,369천원

ㅇ 계 약 일 : '22.11.15.

ㅇ 계 약 자 : (주)에스알디코리아(대표 오정애)

ㅇ 계약기간 : '22.11.15. ~ '23.1.14.

□ 추진경위

ㅇ '22.10.31.	방침 수립

ㅇ '22.11.01.	재난관리기금운용심의회 심의 요청

ㅇ '22.11.07.	'22년 제14차 재난관리기금운용심의회 심의(원안가결)

ㅇ '22.11.14.	염수분사장치 물품 구매 의뢰

ㅇ '22.11.15.	계약 체결

ㅇ '22.12.현재	총 5개소 설비작업 완료(공정률 65%)

- 마포대교, 청담대교, 성산대교(2개소), 아차산지하차도 설비작업 완료

□ 검토내용

ㅇ 계액금액 변경

- 계약금액 변경 내용

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비고
계약금액	845,369,550	1,416,419,550	증) 571,050,000

- 변경사유

·구조적으로 취약한 고갯길, 교량 램프 및 지하차도 진출입로 구간의 선제적 제설작업을 위해 필요한 장비로,

·교량 램프 등 염수분사장치 미설치구간에 추가 설치하여 초기대응력을 강화하고자 함

- 변경 세부내역

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비고
본 체	7조	11조	증) 4조
살수기(배관)	100대	185대	증) 85대

ㅇ 납품기한 연기

- 납품기한 변경 내용

구 분	당 초	변 경	비고
남품기한	'23.1.14.	'23.2.28.

- 연기사유

·염수분사장치 추가 설치에 따른 절대공기 부족으로 납품기한 연장

- 귀책사유 및 지체상금 부과여부

·연기사유 귀책소재 : 서울특별시

·지체상금 부과여부 : 미부과

ㅇ 낙찰차액 사용

- 겨울철 재난 대비의 시급성을 고려 재난관리기금 낙찰차액 등을 활용하여 우리시와 계약되어 있는 (주)에스알디코리아와 계약변경 후 시행

- 낙찰차액 등 현황

(단위:원)

구 분	재배정액	계약금액	낙찰차액	비 고
계	7,588,000,000	7,011,306,480	576,693,520
재 료 비	1,250,000,000	843,311,410	406,688,590
시 설 비	4,686,000,000	4,569,995,070	116,004,930
자산및물품취득비	1,652,000,000	1,598,000,000	54,000,000

□ 조치의견

ㅇ 상기와 같이 검토된 설치수량을 반영하여 "염수분사장치(고갯길, 지하차도 진출입부 제설작업) 구매"에 대한 계약금액 변경을 시행하고,

- 계약금액 증가 금액은 재난관리기금 낙찰차액 등 활용

- 예산과목

·안전총괄실, 재해 및 재난 예방, 재난 예방 및 복구, 재난예방, 재료비(재난관리기금 재난계정) ⇒ 406,688,590원

·안전총괄실, 재해 및 재난 예방, 재난 예방 및 복구, 재난예방, 시설비(재난관리기금 재난계정) ⇒ 110,361,410원

·안전총괄실, 재해 및 재난 예방, 재난 예방 및 복구, 재난예방, 자산및물품취득비(재난관리기금 재난계정) ⇒ 54,000,000원

ㅇ 물품 구매 납품기한을 재무과로 연기의뢰하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

붙임 : 1. 계약변경 사유서 1부.

2. 납품기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.