아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	광암아리수정수센터
수신	행정관리팀장
(경유)
제목	변경계약의뢰(광암아리수정수센터 사업장폐기물(무기성 정수오니)처리 용역)

우리 정수센터 사업장폐기물(무기성 정수오니)처리용역(계약번호 제20220506CD3-01)호와 관련하여 다음과 같이 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명: 광암아리수정수센터 사업장폐기물(무기성 정수오니)처리용역(단가 장기계속계약 1차)

나. 계약업체:광일환경㈜ 대표 김명환

다. 계약기간: 2022. 6. 1.~2022. 12. 31.(총계약기간 : 2022. 6. 1.~2023. 5. 31.)

라. 계약금액: 금156,158,200원(총용역부기금액 : 금232,641,200원)

마. 변경내역: 증액 16,573,480원

○ 1차 계약금액

- 당초: 금139,584,720원(금일억삼천구백오십칠만삼천사백팔십원)

- 변경: 금156,158,200원(금일억오천육백일십오만팔이백원)

○ 총부기계약금액

- 당초: 금232,641,200원(금이억삼천이백육십사만일천이백원)

- 변경: 금232,641,200원(금이억삼천이백육십사만일천이백원)

바. 변경사유: 계약기간 종료에 따른 처리물량 및 계약금액 변경

○ 차수별 금액                                                        (단위:원)

구 분		당 초	변 경	변동사항	비고
총용역비		232,641,200	232,641,200	없음
차수별	1차(2022)	139,584,720	156,158,200	증16,573,480
	2차(2023)	93,056,480	76,483,000	감16,573,480

○ 차수별 계약물량                                                    (단위:톤)

구 분		당 초	변 경	변동사항	비고
총용역물량		4,000	4,000	없음
차수별	1차(2022)	2,400	2,685	증285
	2차(2023)	1,600	1,315	감285

사. 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(수선유지비)

붙임 1. 방침서 1부.

2. 합의서 1부.

3. 산출내역서 1부.  끝.

	정 수 과 장
주무관	최필규		정수과장	12/13
김종희
협조자
시행	정수과-26284	(	2022.12.13	)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293, 광암아리수정수센터 정수과 (광암동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5343	/전송	02-3146-5309	/	auv789@seoul.go.kr	/	부분공개(5)