아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	재무과장
(경유)
제목	설계변경(정산) 시행 및 계약의뢰(2022년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 및 교체 사업)

1. 미래첨단교통과-5949(2022.12.12.)호와 관련입니다.

2. 2022년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 및 교체 사업에 대하여 아래와 같이 설계변(정산) 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : 2022년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 및 교체 사업

나. 계 약 자 : 한국정보기술㈜

다. 사업 기간 : 2022.6.15. ~ 2022.12.31.

라. 설계변경 내역

구 분	변경 전	변경 후	증·감
계약금액	**************	**************	***************

마. 설계변경 사유

1) 현장 확인 결과 수전불가와 민원발생 등으로 단말기 타입 변경 및 수량 조정

2) 가로등 전원활용을 위한 배터리 3개 추가

3) 보험료 정산(건강 및 연금, 노인장기요양), 퇴직공제부금비 및 산업안전보건비 정산 등

바. 예산과목 : 도시교통실 미래첨단교통과, 과학적인 교통정보서비스 구현, 과학적 교통운영체계 구축(교통관리계정), 버스정보안내단말기(BIT) 설치, 시설비및부대비, 시설비

붙임 : 1. 설계변경 검토 보고서 1부.

2. 감리검토의견 1부.

3. 설계변경내역서 1부.

4. 계약금액 검증확인서 1부.

5. 합의각서 1부.  끝.

	미래첨단교통과장
주무관	김경진		대중교통정보팀장	가순종		미래첨단교통과장	12/13
이수진
협조자
시행	미래첨단교통과-6019	(	2022.12.13	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문1청사 1동 14층 미래첨단교통과 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-4971	/전송	02-2133-4990	/	kyung9718@seoul.go.kr	/	부분공개(5)