문서번호	급수운영과-36579
결재일자	2022. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
서장원		류태현	전결 12/14
			이용구
협조
	주무관		김승완

설계변경 심의 결과보고(1차)

(2022년 관악, 금천구 관내 상수도 시설물공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 12.

남부수도사업소

(급수운영과)

설계변경 심의 결과보고(1차)

(2022년 관악, 금천구 관내 상수도 시설물공사)

「2022년 관악, 금천구 관내 상수도 시설물공사(장기계속단가계약)」 설계변경에 대한 신규공종 및 물량 증 ․ 감에 따른 심의를 마치고 그 결과를 보고드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2022년 관악, 금천구 상수도시설물 공사(단가계약)

○ 계약기간 : 2022. 6. 21. ~ 2023. 5. 31.

○ 계 약 자 : 유덕환경㈜  대표자 김영준

○ 계약금액 : 금961,357,220원

○ 공사개요 : 제수변정비 394개소, 변실정비 145개소

□ 설계변경 심의위원회 개최

○ 일    시 : 2022. 12. 14.(수) 10:00

○ 장    소 : 남부수도사업소 급수운영과(3층)

○ 심의내용 : 신규공종 및 계약물량 증․감사항 심의

○ 참석위원 : 위원장 급수운영과장외 심의위원 3명(시설관리과)

간사 및 입회자 1명

□ 심의위원회 검토 내용

○ 설계변경 타당성 : 타당

○ 신규공종 및 계약변동물량 계약단가 적정 여부 : 적정

○ 제잡비 적정 산정 및 적용 적정성 여부 : 적정

○ 각종 제반규정 준수여부: 준수

□ 설계변경 사유

○ 공사 시행중 현장 시공여건 변화 및 연간단가계약 공사의 특수성으로

신규공종 및 물량변동(증 ․ 감) 발생

- 신규공종 : 「주철관(이형관) 부설공(500㎜) 야간」외 86개 공종

- 물량증가 : 「아스팔트 포장깨기(굴삭기 0.4BH) 야간』외 42개 공종

- 물량감소 : 「콘크리트 포장절단(200㎜이하)」외 38개 공종

□ 설계변경 현황

○ 계약금액 변경 - 변동없음

구 분	금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
공급가액	873,961,109	873,961,109
부가가치세	87,396,111	87,396,111
도 급 비	961,357,220	961,357,220	변경없음

○ 주요 신규공종 내역

공 종	규 격	수 량			변동금액(원)
		단위	당초	변경
주철관 이형관 부설공	500mm, 야간	개소		6	증 1,235,004
KP이탈방지압륜 접합	600mm, 야간	개소		3	증 783,192
플랜지 접합공	700mm, 야간	개소		3	증 398,979
강관접합	900mm, 야간	개소		10	증 7,540,770
강관도장(내부)	900mm, 야간	개소		10	증 1,240,690

○ 주요 물량증가 내역

공 종	규 격	수 량			변동금액(원)
		단위	당초	변경
아스팔트 포장깨기	굴삭기 0.4㎥, 야간	m	11	15	증 82,088
기계다짐	램머80kg-환토재	㎥	79	170	증 751,230
주름마디스텐관 부설공	50㎜	m	1	3	증 47,064
주철(이형관) 부설공	100㎜ 기계, 야간	개소	1	2	증 102,296
철거자재 운반	4.5DT(현장⇒집하장)	톤	1	3	증 42,753

○ 주요 물량감소 내역

공 종	규 격	수 량			변동금액(원)
		단위	당초	변경
콘크리트 포장절단	200mm 이하	m	2,220	1,000	감 2,010,260
인력터파기	견질토사 1-2m	㎥	133	48	감 5,816,720
아스팔트 포장깨기	굴삭기 0.4㎥	㎥	42	10	감 420,160
주철이형관 부설공	D=200mm	개소	46	10	감 1,816,164
제수밸브 철거공	100mm, 재사용시(인력)	일	59	10	감 1,154,783

□ 조치계획

○ 설계변경 심의위원회 개최 결과 적정하게 설계 변경된 것으로

심의된 바, 붙임과 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

붙임  1) 설계변경 검토보고 및 설계변경 내역서 각1부.

2) 설계변경 사전심의의결서 1부.  끝.