아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	상수도사업본부
수신	재무회계과장
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰(도·송수관 정밀안전점검 용역)

1. 우리 본부에서 시행중인「도·송수관 정밀안전점검 용역(강북지역)」에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고 계약의뢰 합니다.

가. 용 역 명 : 도·송수관 정밀안전점검 용역(강북지역)

나. 계약업체 : **********************

다. 계약금액 : *****************************

라. 계약기간 : 2022.4.8 ~ 2022. 12.21.

마. 설계변경 내용

구 분	당 초	변 경	증·감
도 급 비	************	************	**********

바. 설계변경 사유 : 과업물량(도·송수관 연장) 감소, 산업안전보건관리비 정산

사. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비(수선유지비)

붙임 : 1. 설계변경 시행 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 심의의결서 1부.

4. 합의 각서 1부. 끝.

	시 설 관 리 과 장
주무관	최경서		시설관리과장	12/14
신근호
협조자
시행	시설관리과-27889	(	2022.12.14	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, (합동27-1)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1532	/전송	02-3146-1529	/	singirukr@seoul.go.kr	/	부분공개(5)