아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	용역 설계변경 시행(도·송수관 정밀안전점검 용역)

1. 우리 본부에서 시행중인「도·송수관 정밀안전점검 용역(강북지역)」에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 도·송수관 정밀안전점검 용역(강북지역)

나. 계약업체 : **********************

다. 계약금액 : *****************************

라. 계약기간 : 2022.4.8 ~ 2022. 12.21.

마. 설계변경 내용

구 분	당 초	변 경	증·감
도 급 비	************	************	**********

바. 설계변경 사유 : 과업물량(도·송수관 연장) 감소, 산업안전보건관리비 정산

사. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비(수선유지비)

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 심의위원회 개최결과 보고서 1부.

3. 합의 각서 1부. 끝.

주무관	최경서		시설관리과장	신근호		시설부장	강호광		상수도사업본부부본부장	12/14
김권기
협조자	주무관	김범진		주무관	최혜선
시행	시설관리과-27888	(	2022.12.14	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, (합동27-1)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1532	/전송	02-3146-1529	/	singirukr@seoul.go.kr	/	부분공개(5)