문서번호	총무과-36587
결재일자	2022. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	총무부장
서정국		정현석	12/14
			송영민
협 조

한강공원 이촌안내센터 리모델링 전기공사 설계변경(정산) 검토 보고

2022. 12.

한강사업본부

(총 무 과)

한강공원 이촌안내센터 리모델링 전기공사

설계변경(정산) 검토 보고

『한강공원 이촌안내센터 리모델링 전기공사』와 관련하여 당초 설계와 현장 여건이 상이하여 발생한 공사 물량 증·감 반영 및 보험료 정산에 따른 설계변경(정산)을 시행하고자 함

Ⅰ		관련근거

○ 한강공원 이촌안내센터 리모델링 전기공사에 대한 설계변경 실정       보고서 제출(성진2022-1212호, 2022.12.12.)

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 한강공원 이촌안내센터 리모델링 전기공사

○ 공사기간 : 2022. 9. 23. ~ 2022. 12. 20.

○ 계약금액 : 41,612,400원

○ 도 급 자 : (주)성진전업 대표자 장미화

○ 공사내용

- 이촌안내센터 내진보강에 따른 LED 조명 설치 등 내부 전기공사

Ⅲ		설계변경(정산) 내용

○ 계약금액 변경

(단위:원)

구 분		금 액		증·감
		당 초	변 경
도급 금액	공급가액	37,829,455	40,330,000	증 2,717,600
	부가가치세	3,782,945	4,030,000
	계	41,612,400	44,330,000

○ 설계변경(정산) 사유

- 이촌안내센터요청으로 인한 노후 전기온돌 판넬 교체 반영

- 현장 여건에 따른 공사 물량 증·감 내역 반영

- 보험료(건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료 등) 정산

○ 설계변경 내용

구 분	주요 내용	비 고
공사 물량	- 전등설비공사 ·스위치 단로1구 교체 및 설치 : 4개 → 6개 ·스위치박스 매입 1개용 교체 및 설치 : 2개 → 4개 ·절연전선(HFIX) 2.5㎟ : 292M → 318M	현장 여건을 반영 하여 스위치 등 수량및 전선 증가
	- 전열설비공사 ·강제전선관 아연도 42㎜ : 36M → 0M ·가요전선관 비방수 42㎜ : 0M → 30M ·콘센트(접지극부) 15A 2P 교체 및 설치 : 26개 → 45개 ·절연전선(HFIX) 4㎟ : 300M → 585M	현장 시공여건을 반영하여 전선관에 적합한 재질로 변경 및 콘센트 등 물량 증가
	- 임시사무실 간선 설비공사 ·난연 전력케이블(F-CV) 2C*4㎟ : 54M → 69M ·난연 전력케이블(F-CV) 2C*6㎟ : 127M → 300M ·난연 전력케이블(F-CV) 2C*10㎟ : 23M → 30M ·난연 전력케이블(F-CV) 4C*25㎟ : 50M → 95M	당초보다 임시사무소와 센터간 거리 가 증가되어 전선 증가
	- 전기온돌판넬 교체 ·전기온돌판넬 2000*850 : 6장 → 6장 ·전기온돌판넬 1700*850 : 13장 → 13장 ·전기온돌판넬 1250*850 : 2장 → 2장 ·전기온도조절기 2회로용 : 3개 → 3개 ·전기온도조절기 1회로용 : 1개 → 1개 ·기타 1식	센터 요청에 따른 추가 전기온돌 판넬 교체
보험료 정산	- 건강보험료 : 757,190원 → 0원 - 연금보험료 : 974,923원 → 0원 - 노인장기요양보험료 : 92,907원 → 0원

○ 예산과목

- 한강사업본부 총무과, 한강공원 관리 및 운영, 한강공원 시설

관리 및 개선, 한강사업본부 청사시설 유지관리, 시설비 및

부대비, 시설비(예산편성부서:한강사업본부 기획예산과)

Ⅳ		조치의견

○ 상기와 같이 검토결과 증빙자료 등을 통해 적합하다고 확인하였

으며, 설계변경(정산)을 시행코자 함.

붙임 : 1. 설계변경 실정보고서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 계약금액조정 검증확인서 1부.

4. 합의각서 1부. 끝.