현장중심! 민생중심! 더불어 행복한 성북
	성 북 구
수신	내부결재
(경유)
제목	길음푸르지오아파트 주변 외 3개소 도로 열선시스템 물품 구매 설치 설계변경(1차, 정산) 시행

우리구에서 시행 중인 길음푸르지오아파트 주변 외 3개소 도로 열선시스템 물품 구매 설치에 대하여 다음과 같이 설계변경(1회, 정산)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 길음푸르지오아파트 주변 외 3개소 도로 열선시스템 물품 구매 설치

2. 공사기간 : 22. 10. 31. ~ 12. 30.

3. 계약금액 : 금571,688,000원(금오억칠천일백육십팔만팔천원)

4. 계약상대자 : (주)다해산업개발

5. 설계변경 사유 : 제경비 정산(보험료 등)

6. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구분		당초	변경	증·감
도급비	계	571,688,000	544,940,000	감) 26,748,000
	공급가액	519,716,364	495,400,000	감) 24,316,364
	부가가치세	51,971,636	49,540,000	감) 2,431,636

7. 예산과목

- 도로과, 안전하고 쾌적한 도로화경 조성, 친환경적이고 특색있는 도로관리, 친환경도로 제설장치 설치, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 검토보고 1부.  끝.

주무관	한상오		도로시설담당	이태기		도로과장	송승익		건설교통국장	12/14
김석우
협조자	계약담당	신정경		재무과장	강은주
시행	도로과-22892	(	2022.12.14	)	접수		(		)
우	02848	서울특별시 성북구 보문로 168	/	http://www.sb.go.kr
전화	02-2241-3562	/전송	02-2241-6561	/	hso1983@sb.go.kr	/	부분공개(5)