현장중심! 민생중심! 더불어 행복한 성북
	성 북 구
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(제3회) 시행[2022년 관내2구역 하수시설물 보수공사(연간단가)]

우리구에서 시행중인 「2022년 관내2구역 하수시설물 보수공사(연간단가)」에 대하여 아래와 같이 제3회 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2022년 관내2구역 하수시설물 보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2022. 3. 18. ~ 12. 31.

다. 도 급 자 : ************

라. 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경 후	증 ㆍ 감		비 고
총 공 사 비	1,876,000,000	2,369,943,420	증)	493,943,420
도 급 비	1,410,860,000	1,954,580,000	증)	543,720,000
관 급 비	178,580,000	232,299,760	증)	53,719,760
이 전 비	286,560,000	183,063,660	감)	103,496,340

마. 설계변경 사유

- 2022. 8월 집중호우에 따른 하수관로 및 맨홀 긴급 정비와 침수취약가구 침수방지예방 사업 반영한 시공물량 증·감 등(별첨 참조)

바. 예산과목

1) 치수과, 하천 및 하수시설 정비, 하수시설 개량 확충, 하수 시설물 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비 : 금1,600,000천원 [ 증)300,000천원]

- 추가경정예산 : 200,000천원, 특별조정교부금 : 100,000천원

2) 자치행정과, 구민중심의 동행정운영, 효율적인 동행정운영, 동소규모주민생활편익사업 운영, 시설비 및 부대비, 시설비(자치행정과) : 금100,000천원

3) 도시안전과, 재해 및 재난 복구 능력 강화, 재난관리기금운용, 재해예방및응급복구, 시설비 및 부대비, 시설비(도시안전과) : 금130,000천원 [ 증)30,000천원 ]

4) 하수시설관리(사업), 하수도관리(사업), 하수시설물 긴급복구 및 정비, 수선유지교체비, 수선유지비(시비) : 금450,000천원 [ 증)100,000천원 ]

5) 물순환안전국, 물재생계획과, 하수시설관리(사업), 하수관로 신설개량(사업), 노후 불량 하수맨홀 정비, 수선유지교체비, 수선유지비(시비) : 금90,000,000원 [ 증)60,000천원 ]

붙임  1. 설계변경(제3회) 사유서 1부.

2. 설계변경(제3회) 내역서 1부.

3. 제비율 검증표 1부.

4. 일상감사 결과 통보서 1부.

5. 관련 방침서 각 1부.  끝.

주무관	김도연		하수담당	김정훈		치수과장	김윤기		건설교통국장	김석우
부구청장	12/14
신상철
협조자	주무관	장성호		계약담당	신정경		재무과장	강은주
시행	치수과-22828	(	2022.12.14	)	접수		(		)
우	02848	서울특별시 성북구 보문로 168 성북구청 10층 치수과 하수팀 (삼선동5가)	/	http://www.sb.go.kr
전화	02-2241-3635	/전송	02-2241-6563	/	2010113023@sb.go.kr	/	부분공개(5)