현장중심! 민생중심! 더불어 행복한 성북
	성 북 구
수신	내부결재
(경유)
제목	동구여중 주변 도로 열선시스템 물품 구매 설치 설계변경(1차, 정산) 시행

우리구에서 시행 중인 동구여중 주변 도로 열선시스템 물품 구매 설치에 대하여 다음과 같이 설계변경(1회, 정산)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 동구여중 주변 도로 열선시스템 물품 구매 설치

2. 공사기간 : 22. 11. 1. ~ 12. 31.

3. 계약금액 : 금546,500,000원(금오억사천육백오십만원)

4. 계약상대자 : 주식회사 와이즈일렉

5. 설계변경 사유 : 제경비 정산(보험료 등)

6. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구분		당초	변경	증·감
도급비	계	546,500,000	522,500,000	감) 24,000,000
	공급가액	496,818,182	475,000,000	감) 21,818,182
	부가가치세	49,681,818	47,500,000	감) 2,181,818

7. 예산과목

- 도로과, 안전하고 쾌적한 도로화경 조성, 친환경적이고 특색있는 도로관리, 친환경도로 제설장치 설치, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 검토보고 1부.  끝.

주무관	한상오		도로시설담당	이태기		도로과장	송승익		건설교통국장	12/14
김석우
협조자	계약담당	신정경		재무과장	강은주
시행	도로과-22893	(	2022.12.14	)	접수		(		)
우	02848	서울특별시 성북구 보문로 168	/	http://www.sb.go.kr
전화	02-2241-3562	/전송	02-2241-6561	/	hso1983@sb.go.kr	/	부분공개(5)