문서번호	정수시설과-29282
결재일자	2022. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	안전관리팀장	정수시설과장	암사아리수정수센터소장
김우빈	오광준	전훈	12/14
			김상동
협 조

설계변경(정산) 보고

(2022년 건설폐기물 처리용역)

2022. 12.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

설계변경(정산) 보고(2022년 건설폐기물 처리용역)

『2022년 건설폐기물 처리용역』 준공 예정에 따라 아래와 같이 설계변경(정산) 시행하고자 보고드림.

1		공 사 개 요

1. 공사개요

□ 용 역 명 : 2022년 건설폐기물 처리용역

□ 계 약 자 : ***************

□ 용역기간 : 2022. 3. 30. ~ 2022. 12. 15.

□ 계약금액 : ***********

□ 용역개요 : 건설폐기물 운반 282㎥, 건설폐기물 처리 560ton

2		설계변경 내용

2. 설계변경(정산) 내용

□ 시공물량 증감 내역

공 종	규 격	단 위	수 량		비 고
			당 초	변 경
건설폐기물 운반	폐아스콘	㎥	2	0
	폐콘크리트	㎥	250	176.6
	혼합폐기물	㎥	30	64.8
	계	㎥	282	241.4
건설폐기물 처리	폐아스콘	ton	4	0
	폐콘크리트	ton	529	373.6
	혼합폐기물	ton	27	58.3
	계	ton	560	431.9

□ 주요 물량변경 현황

- 「2정수장 여과지 하부집수장치 개선공사 」 폐기물 물량 반영

- 취수장 스크린 폐기물 물량 반영

- 「1정수장 여과지 하부집수장치 개선공사 」 폐기물 물량 반영

- 기타 공사현장 각종 폐기물 처리, 각 현장별 여건에 따른 물량 증감

□ 설계변경 금액

구 분	금 액 (원)
	당 초	변 경	증 · 감
총공사비	26,324,800	25,151,500	감) 1,066,636
공급가액	23,931,636	22,865,000	감) 106,664
부 가 세	2,393,164	2,286,500	감) 1,173,300

□ 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 정수센터 시설 유지보수, 수선유지교체비

3		조 치 의 견

□ 위와 같이 설계변경(정산) 시행하여, 정산후 준공하고자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서 등 1부.

2. 제경비 검증확인서 1부.  끝.