문서번호	토목부-36457
결재일자	2022. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이승주		한병찬	12/14
			하현석
협조
	주무관		도제경

설계변경(전체10회, 7차2회) 검토 보고

[올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 건설폐기물 처리용역]

2022. 12.

도시기반시설본부

(토    목    부)

설계변경(전체10회,7차2회) 검토 보고

[올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 건설폐기물 처리용역]

「올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사」와 관련하여 실정보고 승인사항을 반영하기 위한 건설폐기물 처리용역 설계변경 검토보고임

[관련근거] 건설폐기물 처리용역 변경설계서(전체10회,7차2회) 제출 [올대감22-273(2022.12.13.)호]

1		용 역 개 요

○ 용역명 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 건설폐기물 처리용역

○ 기  간 : '16.8.11. ~ '22.12.31.(7차 : '22.5.10.~'22.12.31.)

○ 규  모 : 폐기물처리(폐콘크리트 23,885톤, 폐아스콘 29,656톤)

폐기물운반(폐콘크리트 10,216㎥, 폐아스콘 12,620㎥)

○ 도급비 : 1,365,800천원(7차 : 430,801천원)

○ 용역사 : (자)금강개발

2		설계변경 내용

○ 변경내역                                                           (단위 : 원)

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

○ 변경사유

- 실정보고 승인사항 반영(버스정류소 이전 및 한강둔치 주차장 복구 등 4건)

○ 주요 변경 내용

- 전체10회

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

- 7차 2회

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

○ 실정보고 내용                                                                    (단위 : 천원)

연번	문서번호 (승인일)	보 고 내 용	당 초	변 경	증·감		비고
*	************ ***********	***************************** **********************************************************	*******	*******	*	*******
*	************ ***********	************************ *************************** ********************	******	******	*	*******
*	************ ***********	*************************** **************************** ***********	*	*****	*	*****
*	************ ***********	**************************** **************************** *****************	*	******	*	******
		****	*******	*******	*	*******

3		조 치 의 견

○ 토목 공사 실정보고 승인에 따른 건설폐기물 물량 변경(증감)을 반영하기 위한 사항으로 정산 설계변경(전체10회, 7차2회) 시행코자 함.

붙임  1. 건설사업관리단(시공사) 공문 1부.

2. 설계변경 내역서 각 1부.  끝.