문서번호	기반시설과-25291
결재일자	2022. 12. 15.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	기반시설과장	시설부장
권용재	이병철	12/15
		박상보

2022년 한강수경시설(10개분수) 잔여 유지보수공사(연간단가)

제1회 설계변경 및 준공(정산) 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022년 한강수경시설(10개분수) 잔여 유지보수공사(연간단가)

제1회 설계변경 및 준공(정산) 계획

「2022년 한강수경시설(10개분수) 잔여 유지보수공사」가 완료되어, 물량 증·감 및 정산내용을 반영한 설계변경을 시행하여 공사준공하고자 함

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 2022년 한강수경시설(10개분수) 잔여 유지보수공사(연간단가)

□ 계약업체 : ㈜성진조경

□ 계약기간 : 2022. 11. 07. ~ 2022. 12. 20.

□ 계약금액 : 229,096,000원

□ 공사내용 : 한강수경시설(10개분수) 기계·전기·통신 등 시설물 유지보수

Ⅱ		설계변경 내용 및 사유

□ 설계변경 내용

ㅇ 계약금액 변경 : 감 2,480,000원

- 당초 : 229,096,000원 → 변경 : 226,616,000원

ㅇ 계약기간 변경 : 변경사항 없음

□ 설계변경 사유 : 공사물량 증·감 및 미사용 보험료 정산

ㅇ `22. 11. 30. : 잔여공사 계약 후 시설물 점검하여 발생한 공사 물량 증·감에 대한 실정보고(제1차) 승인

- `22. 12. 02. : 제2차 작업지시(제1차 실정보고 내용)

Ⅲ		금회 설계변경(정산) 계획

□ 제3회 설계변경 총괄내역

구 분		현 계약금액	변경 계약금액 (1회 )	증 감 금액
순공사비	재료비	108,930,198	82,809,326	26,120,872
	노무비	37,052,132	74,910,484	37,858,352
	경 비	35,628,995	22,745,230	12,883,765
순공사비 계⒜		181,611,325	180,465,040	1,146,285
일반관리비⒝		9,988,622	9,817,160	171,462
이윤⒞		12,399,634	15,732,346	3,332,712
고용개선지원비 ⒟		4,269,510	-	4,269,510
공사원가 계 ⒜~⒟		208,269,091	206,014,546	2,254,545
부가가치세		20,826,909	20,601,454	225,455
총공사비		229,096,000	226,616,000	2,480,000

ㅇ 물량변동내역 : 증 12,397천원

물량 변동 내역

▪ 뚝섬 음악분수 감)44,736,264원
증)솔밸브 24개, 차단기 5개, AMP 1대, 스피커 2대, 콘솔 및 오디오 1대, 제어반 접근 철제계단 1개	감)무빙모터시스템 5개, 심정펌프 4세트, 저수조 배기팬 1개소

▪ 뚝섬 물보라극장 감)1,606,045원
증)부력대 부양/침수 2회, 분수대청소 1회, 보조영사실 케이블 설치 총 350m, 고무보트대여 3회, 고압세척기임대 1회	감)에어컨설치 1대, 기상관츨시스템 1개소, CPU 및 입출력장치 점검 1식

▪ 뚝섬 벽천분수 증)28,094,852원
증)벽체 도장 650m², 고소작업차량 및 교통통제 1일	감)고압세척기 임대 1일, 벽체 판석 보수 1식

▪ 여의도 물빛광장 증)11,850,173원
증)차단기 교체 1개, 피아노길 판석 교체 1.2m², 피아노길 석교설치 2개소, 저류조 배수펌프 2대, 오배수펌프 1대, 오디오시스템 1식	감)팀뷰어 구매 1식, 저수조 랜턴 1개

▪ 여의도 수상분수 증)7,261,824원
증)부력대 부양/침수 2회, 분수대청소 1회, 오디오시스템 1식, 인입전기 결선 1회, 고압세척기 임대 1회, 고무보트 임대 1회	감)팀뷰어 구매 1식

▪ 난지 거울분수 감)5,742원
증)인버터 교체 7대, 분수가동전용컴퓨터 및 프로그램 1식, 차단기 교체 25개, 제어반 캐노피 1식, 제어반 철제계단 1개	감)LED교체 2개, 노즐 35개, 노즐커버 5개, 심정펌프 5대, 고압세척기 임대 3일, 팀뷰어구매 1식, 저수조 내부 조명등설치 5개소

▪ 난지 물놀이장분수 증)9,710,968원
증)제어반 제어시스템 환경개선 1식, 분수대청소 1회, 판석철거 및 재설치 70.5m², 제어반 철제계단 1개, 판석 설치 2.2m²	-

▪ 원격시스템 증)1,827,528원
증)원격운영 전용컴퓨터 설치 1식	-

ㅇ 경비 정산 : 감 17,153천원

비 목		계 약 금 액	변경금액(정산)	증 감
경비	계	39,898,505	22,745,230	17,153,275
	직접경비	2,342,240	7,592,960	5,250,720
	산재보험료	1,370,928	2,629,357	1,258,429
	고용보험료	374,226	717,743	343,517
	건강보험료	4,469,318	-	4,469,318
	연금보험료	5,754,487	-	5,754,487
	노인장기요양보험료	548,385	-	548,385
	퇴직공제부금	2,941,182	136,500	2,804,682
	산업안전보건관리비	6,448,061	-	6,448,061
	환경보전비	431,494	-	431,494
	고용개선지원비	4,269,510	-	4,269,510
	기타경비	10,948,674	11,668,670	719,996

※ 산재·고용보험료, 퇴직공제부금 등 사용내역 증빙자료 첨부

Ⅳ		준 공 계 획

□ 물량 증·감 및 제경비 정산에 따른 계약변경 후 공사준공 시행

□ 계약상대자로부터 산재·고용보험료, 퇴직공제부금 등 제경비 완납증명서 제출받아 검토한 결과 적정함

□ 준공정산 지급예정액 : 89,952,000원

구 분	금 액
1회 변경 계약금액⒜	226,616,000
기지급액⒝	132,121,000
ㅇ선금 지급액	132,121,000
ㅇ노무비 지급청구액(12)월	4,543,000
ㅇ1회 기성 지급액	-
준공정산 지급예정액⒞	89,952,000

붙임 1. 설계변경(정산) 내역서 1부.

2. 설계변경 및 정산(감액) 합의서 1부.

3. 고용산재 가입 및 완납증명원 각1부.

4. 퇴직공제부금 납부확인서 1부.

5. 건강연금완납증명서 1부.

6. 제비율검증확인서 1부.  끝.