아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(한강공원 이촌안내센터 리모델링 전기공사)

1. 총무과-36587호(2022.12.14.)와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행 중인 한강공원 이촌안내센터 리모델링 전기공사의 설계변경을       아래와 같이 시행 하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 한강공원 이촌안내센터 리모델링 전기공사

나. 공사기간 : 2022. 9. 23 ~ 2022. 12. 20

구 분	당 초	변 경	증·감
계약금액	41,612,400원	44,330,000원	증 2,717,600

다. 계약금액 : 41,612,400원(사천일백육십일만이천사백원)

라. 계약업체 : ㈜성진전업 대표 장미화

마. 설계변경 내역

바. 변경사유 : 현장상황에 따른 물량변경 및 보험료 정산

사. 예산과목 : 한강사업본부 총무과, 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선,                     한강사업본부 청사시설 유지관리, 시설비및부대비, 시설비(예산편성부서 :                     한강사업본부 기획예산과)

붙임  1. 설계변경 검토 보고 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 검증확인서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

주무관	서정국		총무과장	12/15
정현석
협조자	주무관	안미희
시행	총무과-36710	(	2022.12.15	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257, 총무과	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0892	/전송	02-3780-0740	/	sjk2074k@seoul.go.kr	/	부분공개(5)