문서번호	시설관리과-43282
결재일자	2022. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이승환		유세종	12/15
			이동욱
협조

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

(2022년 한천로 외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.12

중부수도사업소

시설관리과

설계변경 심의자료

가. 공 사 명 : 2022년 한천로 외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사

나. 제    목 : 설계변경심의

다. 일    시 : 2022. 12. 15.(목) 오전 10:00

라. 참 석 자 : ******************************

*******************************

마. 공사개요

구 분	구 경	연 장	비 고 (증,감)
당 초	*********	****
변 경	*********	****	******

바. 공사기간 : 2022. 06. 03. ~ 2022. 12. 18.

사. 공사금액

구 분	설계변경 현황			비고
	당 초	변 경	증 ․ 감
도급비 (VAT포함)	**************	**************	*************	*******

아. 설계변경 심의내용 : 아래 첨부

설계변경 심의내용

1. 공사 현황

가. 공 사 명 : 2022년 한천로 외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사

나. 공사개요

구 분	구 경	연 장	비 고 (증,감)
당 초	*********	****
변 경	*********	****	******

다. 공사기간 : 2022. 06. 03. ~ 2022. 12. 18.

라. 수 급 인 : ***************

2. 설계변경 사유보고

가. 공사현장 상태와 설계서 상이로 인한 변경(실정보고 및 추가 작업지시)

**

**

나. 제경비 등 실 사용정산에 의한 변경

*

3. 주요 공종수량 증․감 발생 현황

**

4. 공사비 변경                                             (단위 : 원)

***************************************************************************************************************************************************************************************************************

5. 설계변경 검토결과

가. 물량이 증. 감한 일부공종에 대해 계약율 적용 : 적정함

나. 최종설계변경 시행으로 계약금액 변경에 따른 공종, 물량 변동 : 적정함

다. 신공종에 대해 낙찰율 적용 : 적정함

6. 행정사항

가. 설계변경 시행 후 우리사업소 행정지원과에 설계변경 계약 의뢰

붙 임: 1. 설계변경 심의 결과(의견서) 1부.

2. 설계변경내역서 1부.  끝.