문서번호	정수시설과-26357
결재일자	2022. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
정상수		代전준원	12/15
			정미선
협 조
	주무관			권이삭
	주무관			장현순

『2022년 뚝도아리수정수센터 시설물 정밀안전점검용역』 준공기한 연기 검토 보고

믿고 마시는 아리수!

2022. 12.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

『2022년 뚝도아리수정수센터 시설물 정밀안전점검용역』

준공기한 연기 검토 보고

입상활성탄 납품일정 연기에 따라, 현재 시행 중인『2022년 뚝도아리수정수센터 시설물 정밀안전점검용역』의 준공기한 연기에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		사업현황

▢ 입상활성탄 납품일정

○ 일 정 -- ******************************************

납품기한(당초)	납품기한(변경)
*************	*************

▢ 용역현황

○ 공 사 명 : ****************************

○ 용 역 비 : ***********

○ 용역기간 : 2022. 2.14. ~ 2022.12.20.

○ 용역개요

구 분		위 치	설치년	규 모	비고
토 목	*****	***********	****	**********	**********
	*****	************	****	**********
건 축	*****	***********	****	***********	**********
	*****	************	****	**********

○ 용 역 자 : ***************

Ⅱ		검토의견

○ 중국내 코로나 확진자 수 증가에 따른 활성탄 생산도시 봉쇄로 인하여 활성탄 국내 반입 및 준설공사 지연으로 활성탄흡착지 시설물 안전점검을 위하여 준공기한 연기가 불가피한 상황임.

○ 준공기한 연기사유는 『(계약예규)공사계약일반조건』제19조 발주기관의 필요에 의한 설계변경 사항으로 제25조 규정에 의거 설계변경으로 인하여 준공기한내 계약을 이행할 수 없는 경우로써 계약상대자의 귀책사유가 아니므로 지체상금 부과없이 준공기한을 연기함이 타당함.

- 준공기한 연기(안)

당 초	변 경
*************************	*************************

Ⅲ		조치계획

▢ 공사 준공기한 연기

○ 연기사유 : 중국내 코로나 확진자 수 증가에 따른 활성탄 생산도시 봉쇄로 인하여, 활성탄 국내 반입 및 준설공사 지연으로 활성탄흡착지 시설물 안전점검을 위하여 준공기한 순연

○ 연기기한 : 2022.12.28.

○ 귀책소재 : 서울특별시

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅳ		향후계획

○ 공사 준공기한 의뢰.

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.