문서번호	기전과-32202
결재일자	2022. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
진수경		김은덕	12/15
			임대운
협 조

「2022년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)」

집행잔액 사용 및 설계변경(2차) 검토보고

2022. 12. 15.(목)

동부도로사업소

(기전과)

「2022년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)」

집행잔액 사용 및 설계변경(2차) 검토보고

우리사업소에서 시행중인「2022년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)」의 원활한 사업추진과 예산의 효율적인 사용을 위하여 집행잔액 사용 및 설계변경(2차)에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		관련근거

□ 2022년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)

○ 계약번호[20220400BBB-01]

□ 2022년 교통사고 잦은 곳 개선사업 추진 계획(포스코사거리 외 4개소)

○ 기전과-28004(2022.9.21.)호

□ 2022년 도로교통 소통 개선사업 추진계획(올림픽공원남2문교차로 외 1개소)

○ 기전과-28054(2022.9.22.)호

□ 2022년 횡단보도 확충사업 발주계획(강일중학교 외 4개소)

○ 기전과-27990(2022.9.21.)호

□ 서울시도 제한속도조정 교통안전표지 개선공사 추진계획

○ 기전과-30607(2022.11.15.)호

2		사업개요

□ 사 업 명: 2022년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)

□ 사업내용: 강남구, 송파구, 강동구, 서초구 일부 교통안전표지 유지보수

□ 사업기간: 2022. 4. 5. ~ 2022. 12. 31.

□ 계 약 자: ****************

□ 계약금액: ************

□ 감리업체: ****************

3		설계변경 내용

□ 설계변경 사유

○ 2022년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)

- 경찰청 규제사항 및 민원 처리 등 현장 여건에 맞추어 실제 사용물량에 따른 변경 발생 및 제경비 정산에 따라 ******************************

- 예산집행 현황

(단위: 천원)

연번	공사명	예산배정액 (A)	품의금액 (B)	원인행위액	집행잔액 (E=A-B)
1	2022년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)	*******	*******	******	*****

○ 도로교통 안전개선사업(교통사고 잦은 곳 개선공사 외 3건)

- 교통안전표지 유지보수공사에 포함하여 설계변경

□ 사업별 공사개요

(단위: 천원)

연번	사업명		공사개요	재배정금액	소요예산
합계				*******	*******
1	2022년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)		- 1~3차 작업지시: 신설101매, 교체94매 - 4차 작업지시: 신설28매, 교체26매	*******	******
2	도로교통 안전개선사업		교통안전표지 신설 등	******	******
		2022년 교통사고 잦은 곳 개선사업	- 교통안전표지 신설45매, 철거12매	******	******
		2022년 도로교통 소통 개선사업	- 교통안전표지 신설7매, 철거12매	*****	*****
		2022년 횡단보도 확충정비 사업	- 교통안전표지 신설2매, 이설16매	*****	*****
		서울시도 제한속도조정 교통안전표지 개선사업	교통안전표지 신설87매, 철거80매	******	******

□ 주요 변경수량

구분	품명		규격	단위	수 량				비고
					당초	변경	증·감
연간단가	중형 원형	교체	Φ780 고휘도	EA	**	**	*	**
	중형 사각	신설	780*1170 고휘도	EA	*	**	*	**
	중형 T형부착대	교체	1매용 백관	EA	*	**	*	**
	고소용	신설	-	EA	**	**	*	**
	고소용	교체	-	EA	**	**	*	*
기타 단위사업	중형 원형	교체	Φ780, Φ900 고휘도	EA	*	**	*	**
	중형 사각	신설	780*780,900*300	EA	*	**	*	**
	중형 T형부착대	교체	2매용 백관	EA	*	**	*	**
	고소용	신설	-	EA	*	**	*	**
	고소용	교체	-	EA	*	**	*	**

□ 보험료 및 제경비 정산

(단위: 원)

구분	변경전 금액	변경후 금액	증·감		비고
기계경비	*********	*********	*	******
산재보험료	*******	*********	*	*******
고용보험료	*******	*******	*	*******
건강보험료	*******	*	*	*******
연금보험료	*******	*	*	*******
기타경비	*********	*********	*	*********
퇴직공제부금비	*******	*	*	*******
산업안전보건관리비	*********	*********	*	*******
노인장기요양보험료	******	*	*	******
건설기계대여대금	******	*	*	******
환경보전비	*******	*	*	*******
고용개선지원비, 이동형렌탈사용료	*********	*	*	*********

4		설계변경 금액

(단위: 원)

구 분		변경 전	변경 후	증 ․ 감		비고
총 공 사 비		**********	***********	*	**********
도급비	공 급 가 액	**********	***********	*	**********
	부가가치세	*********	**********	*	*********
	소 계	**********	***********	*	**********

5		보고자 의견

□ 집행잔액 사용 및 2차 설계변경에 대하여 검토한 결과 적정한 것으로 판단되어 상기와 같이 설계변경 후 준공처리 하고자 함

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 도로교통 안전개선사업 방침서 각 1부.

3. 설계변경 검증확인서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.