문서번호	토목부-36485
결재일자	2022. 12. 15.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이회진		代김광호	12/15
			하현석
협조

- 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사 -

2차공사 추진계획 보고

2022. 12.

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사 -

2차공사 추진계획 보고

창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사 2차공사 발주서 제출에 따른 검토결과 및 조치계획을 보고 드림

□ 근  거

○ 보차도교 장기2차 공사발주서 검토보고(창동상계 제22-279호, `22.12.13.)

□ 공사개요

○ 사 업 명 : 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사

○ 규    모 : 보차도교 신설(B=32.0m,  L=118.0m)

○ 총공사비 : 18,580백만원(**************************************)

○ 사업기간 : ’21. 04. 19. ∼ ’24. 04. 18.

- 1차 : ‘21. 04. 19.  ~ ’22. 12. 15.

- 2차 : ’22. 12. 16.  ~ ‘23. 12. 15.

○ 시 공 사 : 하웅종합건설(주) 외 1개사

○ 감 리 사 : ***************

위 치 도	조 감 도

□ 추진경과

○ `21. 03. 23. : 공사계약

○ `21. 04. 19. : 1차공사 착공

○ `22. 12. 15. : 1차공사 준공(예정)

○ `22. 12. 16. : 2차공사 착공(예정)

□ 2차공사 추진계획

○ 2차공사 발주금액 : ****************************************

(단위 : 원)

구 분	총 차	1차공사	2차공사(금회)	장래분
계	**************	*************	*************	*************
도 급 액	**************	*************	*************	*************
관급자재	*************	***********	***********	***********
이 전 비	*********	*********	*	*
공사기간	*******************	*******************	********************

○ 2차 공사 추진물량 및 금액

- 하부공(교대·교각) 및 강교 제작·운반·가설공사 추진

※ '23.05월 하부공 완료 예정                                         (단위 : 천원)

공 종		주요공종	물량	단위	금 액	비 고
보차도교	토 공	구조물뒷채움/세굴방지용사석	*****	*	********
	구조물공	하부공(A1/A2/P1/P2)	*	*	********	'22년5월 완료
		강관말뚝	*****	*	********	'22년5월 완료
	상부공	강교제작	*****	*	**********
		강교운반 및 가설	*****	*	********
	가시설공	가시설해체	*	*	*******	'22년5월 완료
	부대공	사무실/운반공/사급자재외	*	*	********
소 계					**********
램프교 시 점	구조물공	하부공	*	*	******	'22년5월 완료
	상부공	강교제작/운반/가설	**	*	********
램프교 종점-1	구조물공	하부공	*	*	*******	'22년5월 완료
	상부공	강교제작/운반/가설	*	*	*******
램프교 종점-2	구조물공	하부공	*	*	*******	'22년5월 완료
	상부공	강교제작/운반/가설	*	*	*******
소 계					********
직접공사비 계					**********
제경비					**********
제경비제외공종					*******
물가변동(K1~3)					********
총도급액					**********
관급자재비					********
총공사비					**********

□ 검토결과

○ 상기 검토결과와 같이 '23년 확보예정인 사업예산(시설비) 120억원 중 93억원

을 활용하여 2차공사 계약을 추진하고자 함.

붙 임 : 1. 건설사업관리단 검토 보고서 1부.

2. 내역서(전체, 2차) 및 예정공정표(전체, 2차) 1부. 끝.