문서번호	기전과-32197
결재일자	2022. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
박요셉		12/15
		김은덕
협조

『2022년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』

설계 변경(2회) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.  12. 15. (목)

동부도로사업소

(기전과)

『2022년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』

설계 변경(2회) 검토 보고

2022년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)와 관련 감리업체로부터 제출된 설계변경 요청사항에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		관련근거

□ 2022년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가) 3차 (추가)작업지시 완료보고

ㅇ (주)주현이앤씨 주현(동부)2022-048호(2022.10.14.)

□ 2022년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가) 4차 (추가)작업지시 완료보고

ㅇ (주)주현이앤씨 주현(동부)2022-066호(2022.12.2.)

□ 2022년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가) 2차 설계변경 제출 건

ㅇ (주)주현이앤씨 주현(동부)2022-079호(2022.12.14.)

2		사업개요

□ 사 업 명 : 2022년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)

□ 사업내용 : 송파구, 강동구 교통신호기 유지보수

□ 사업기간 : 2022. 3. 24. ~ 12. 31.

□ 계 약 자 : ㈜엠비에스엔지니어링 대표 강형주

□ 계약금액 : ********************************

□ 감리업체 : ㈜주현이앤씨 대표 이정수

3		설계변경 내용

□ 설계변경 사유

ㅇ 경찰청 교통안전시설물 규제사항 처리중 현장 현안사항 발생으로  인한 시공방법 변경 및 담당 기관간 협의 진행 등 내역이 변경됨에 따라 변경

□ 주요 물량 변경내역

연번	품 명	규 격	구분	단위	수량			금액(원)
					당초	변경	증,감	당초	변경	증,감
1	제어기완성품(표준형)	관급, 교차로용	신설	대	5	13	8	2,808,670	7,302,542	4,493,872
2	차량신호등 설치	관급, 1면3,4색 1조	신설	조	9	12	3	2,792,214	3,722,952	930,738
3	차량신호등 설치	관급, 1면3,4색 2조 동시	신설	조	5	14	9	2,792,215	7,818,202	5,025,987
4	경보신호등 설치	관급, 1면2색 2조 동시	신설	조	6	11	5	3,350,658	6,142,873	2,792,215
5	보행신호등 설치	관급, 1면2색 1조	신설	조	3	19	16	284,055	1,799,015	1,514,960
6	잔여시간표시기 설치	관급, 역삼각형, 숫자형	신설	조	10	28	18	946,850	2,651,180	1,704,330
7	보조신호등 설치	관급, 1면3색(관급) 1조	신설	조	2	3	1	189,370	284,055	94,685
8	보행신호등 및 잔여시간표시기 설치	관급, 1면3색 1조	신설	조	25	41	16	4,260,800	6,987,712	2,726,912
9	시각장애인용 음향신호기	본체(사급)-밴드식,브라켓	신설	대	40	133	93	24,356,960	80,986,892	56,629,932
10	보행자 작동신호기 압버튼 설치	단일로, LED 방수형	신설	대	1	8	7	282,347	2,258,776	1,976,429
11	교통신호등지주 신설(관급)	관급,Ø250㎜×8M	신설	본	4	6	2	1,010,208	1,515,312	505,104
12	교통신호등지주 신설(관급)	관급,Ø200㎜×8M	신설	본	5	16	11	1,262,760	4,040,832	2,778,072
13	교통신호등지주 신설(관급)	관급,Ø125㎜×4M	신설	본	4	11	7	1,010,208	2,778,072	1,767,864
14	지주부착대 설치(관급)	관급,9M	신설	본	2	3	1	404,000	606,000	202,000
15	지주부착대 설치(관급)	관급,7M	신설	본	5	8	3	841,840	1,346,944	505,104
16	지주부착대 설치(관급)	관급,6M	신설	본	1	4	3	168,368	673,472	505,104
17	지주부착대 설치(관급)	관급,5M	신설	본	2	7	5	336,736	1,178,576	841,840
18	신호케이블	지중1선, F-CVV,1.5SQ/5C	신설	m	524	1,153	629	4,841,760	10,653,720	5,811,960
19	신호케이블	지중2선, F-CVV,1.5SQ/5C	신설	m	65	108	43	1,101,685	1,830,492	728,807
20	신호케이블	지중3선, F-CVV,1.5SQ/5C	신설	m	1	63	62	24,657	1,553,391	1,528,734
21	신호케이블	지중4선, F-CVV,1.5SQ/5C	신설	m	108	256	148	3,495,528	8,285,696	4,790,168
22	신호케이블	가공1선, F-CVV,1.5SQ/5C	신설	m	153	220	67	2,215,287	3,185,380	970,093
23	신호케이블	가공1선(2.5SQ/1.5SQ 공통)	철거	m	75	197	122	448,425	1,177,863	729,438
24	신호케이블	가공2선(2.5SQ/1.5SQ 공통)	철거	m	19	61	42	204,516	656,604	452,088
25	전원선	지중1선, F-CV,6SQ/2C	신설	m	71	294	223	390,287	1,616,118	1,225,831
26	전원선	가공 1선, F-CV,6SQ/2C	신설	m	342	406	64	2,876,220	3,414,460	538,240
27	전선관 배관	PE Ø54㎜,1열	신설	m	16	132	116	245,872	2,028,444	1,782,572
28	전선관 배관	PE Ø100㎜,1열	신설	m	30	55	25	693,120	1,270,720	577,600
29	후강전선관 배관	Ø104㎜×3.6m(KSC 8401), 2열	신설	m	50	60	10	4,863,100	5,835,720	972,620
30	후강전선관 배관 (야간)	Ø104㎜×3.6m(KSC 8401), 2열	신설	m	1	45	44	154,683	6,960,735	6,806,052
31	아스팔트 횡단굴착	B=1.2M, 2열배관	신설	m	46	56	10	2,884,476	3,511,536	627,060
32	소형고압블럭 굴착배관	B=1.2M, 1-2열배관	신설	m	37	131	94	1,152,809	2,759,646	1,606,837
33	소형고압블럭 굴착배관(야간)	B=1.2M, 1-2열배관	신설	m	1	7	6	53,352	250,243	196,891
34	가로등암(1등용)	200W-300W(등기구, 안정기)	이설	본	3	6	3	508,563	1,017,126	508,563
35	가로등 전원선	지중1선(F-CV,4SQ/2C)	신설	m	45	75	30	226,755	377,925	151,170
※ 타 세부사항은 설계변경 내역서 참조

4		설계변경 금액

구 분		변경전 금액	변경후 금액	증 / 감	비고
총공사비		434,808,690	550,924,000	증 116,115,310
도급비	공급가액	395,280,627	500,840,000	증 105,559,373
	부가가치세	39,528,063	50,084,000	증 10,555,937
	소 계	434,808,690	550,924,000	증 116,115,310

(단위 : 원)

5		감리단 검토의견

□ 현장여건에 따른 물량변경 및 보험료 등 제경비 정산으로 설계변경 필요함.

6		보고자 의견

□ 감리업체로부터 접수된 설계변경에 대하여 검토한 결과 감리의견이 적정한 것으로 판단되어 설계변경을 승인하고 관리단속과에 변경계약을 의뢰하고자 함.

붙 임 : 1. 설계변경서류 제출 공문 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 검증 확인서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.