아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(2022년 관악, 금천구 관내 상수도 시설물공사)

우리사업소에서 시행중인 『2022년 관악, 금천구 관내 상수도 시설물공사』에 대하여 설계변경 심의를 완료하고 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2022년 관악, 금천구 관내 상수도 시설물공사(장기계속 단가계약)

나. 계 약 자 : 유덕환경㈜  대표자 김영준

다. 공사기간 : 2022. 6. 21. ~ 2023. 5. 31.

라. 공사개요 : 제수변 정비 294개소, 변실정비 145개소

마. 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총부기금액	961,357,220	961.357,220	-
1차수금액	672,940,000	298,166,000	감 374,774,000	2022년
2차수금액	288,417,220	663,191,220	증 374,774,000	2023년

바. 설계변경 사유 : 신규공종 발생 및 공종별 물량 증,감

사. 예산과목 : - 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비 및 부대비,시설비

-  상수도사업비용, 영업비용, 배급수비. 수선유지교체비, 수선유지비

-  소방용수시설등의 설치 및 관리, 소방용수시설등의 설치 및 보수

붙임  설계변경 관련문서 각1부.  끝.

주무관	서장원		급수관리팀장	류태현		급수운영과장	이용구		남부수도사업소장	12/15
代홍기관
협조자	주무관	공보라
시행	급수운영과-36601	(	2022.12.15	)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로10길 97	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4562	/전송	02-3146-4589	/	sjangwon@seoul.go.kr	/	부분공개(5)