현장중심! 민생중심! 더불어 행복한 성북
	성 북 구
수신	내부결재
(경유)
제목	장위-4 소구역 하수관로 정비사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 설계변경(제1회) 시행

우리 구에서 시행중인「장위-4 소구역 하수관로 정비사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역」에 대하여 아래와 같이 설계변경(제1회)을 시행하고자 합니다.

1. 용 역 명 : 장위-4 소구역 하수관로 정비사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역

2. 용역기간 : 2022.08.05. ~ 2024.09.22.

3. 도 급 자 : 한국종합기술 대표 김치헌 외 3개사

4. 설계변경 내역

가. 1차

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감		비 고
1차 용역비	296,000,000	400,000,000	증)	104,000,000
총차 용역비	1,819,000,000	1,819,000,000

5. 설계변경 사유 : 본 공사 준공기한 연기에 따른 기술인력 증·감

6. 예산과목 : 물재생계획과, 하수시설관리, 소구역 하수관로 정비사업, 장위-4 소구역 하수관로 정비사업, 시설비및부대비, 감리비(하수도공기업특별회계)

붙  임 : 1. 설계변경 사유서(제1회) 1부.

2. 설계변경 내역서 각 1부.

3. 방침서 1부.  끝.

주무관	장성호		하수담당	김정훈		치수과장	김윤기		건설교통국장	12/15
김석우
협조자	주무관	장은철		계약담당	신정경		재무과장	강은주
시행	치수과-22916	(	2022.12.15	)	접수		(		)
우	02848	서울특별시 성북구 보문로 168	/	http://www.sb.go.kr
전화	02-2241-3632	/전송	02-2241-6563	/	purding@sb.go.kr	/	부분공개(5)