현장중심! 민생중심! 더불어 행복한 성북
	성 북 구
수신	내부결재
(경유)
제목	장위-4 소구역 하수관로 정비사업(장기계속) 설계변경(제1회) 시행

우리 구에서 시행중인「장위-4 소구역 하수관로 정비사업(장기계속)」에 대하여 아래와 같이 설계변경(제1회)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 장위-4 소구역 하수관로 정비사업(장기계속)

2. 공사기간 : 2022.09.13. ~ 2024.10.31.

3. 도 급 자 : ㈜거림건설 대표 기남경, 동문건설(주) 대표 이상주

4. 설계변경 내역

가. 1차

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감		비 고
총 공사비	2,767,189,000	2,767,189,000
도급비	1,406,980,000	1,504,450,000	증)	97,470,000
관급비	336,240,000	310,550,000	감)	25,690,000
이전비	1,023,969,000	952,189,000	감)	71,780,000

나. 총차

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감		비 고
총 공사비	10,566,474,000	10,566,474,000
도급비	6,721,504,000	7,212,530,000	증)	491,056,000
관급비	1,735,920,000	1,577,640,000	감)	158,280,000
이전비	2,109,050,000	1,776,304,000	감)	332,746,000

5. 설계변경 사유 : 현장여건 변경에 따른 시공물량 증·감

6. 예산과목 : 물재생계획과, 하수시설관리, 소구역 하수관로 정비사업, 장위-4 소구역 하수관로 정비사업, 시설비및부대비, 시설비(하수도공기업특별회계)

붙  임 : 1. 설계변경 사유서(제1회) 1부.

2. 설계변경 내역서 각 1부.

3. 제비율검증확인서 각 1부.

4. 방침서 1부.  끝.

주무관	장성호		하수담당	김정훈		치수과장	김윤기		건설교통국장	12/15
김석우
협조자	재무과장	강은주		계약담당	신정경
시행	치수과-22898	(	2022.12.15	)	접수		(		)
우	02848	서울특별시 성북구 보문로 168	/	http://www.sb.go.kr
전화	02-2241-3632	/전송	02-2241-6563	/	purding@sb.go.kr	/	부분공개(5)