문서번호	도로과-31639
결재일자	2022.12.15
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		도로관리팀장	도로과장		건설교통국장
모규환		이홍규	최강윤		12/15
					장병조
협 조
						계약심사팀장		유운숙
						계약팀장		심은진

	강동을 새롭게, 구민을 신나게!

「2022년 도로포장 유지보수공사(연간단가)」설계변경(최종, 준공) 시행계획

2022. 12. .

건설교통국

(도 로 과)

「2022년 도로포장 유지보수공사(연간단가)」

설계변경시행계획

우리구에서 시행중인「2022년 도로포장 유지보수공사(연간단가)」와 관련, 시공물량 증·감을 반영하여 설계변경 처리코자 함.

Ⅰ. 공 사 개 요

□ 공 사 명 : 2022년 도로포장 유지보수공사(연간단가)

□ 공사기간 : 2022. 3. 24. ~ 2022. 12. 31.

□ 총공사비 : 금1,861,327천원

❍ 도급비 1,368,447천원, 관급비 348,897천원, 이전비 143,983천원

□ 계약업체 : 주식회사 신작로(대표 김양호)

Ⅱ . 주요 변경내용

□ 설계변경 사유

❍ 공종별 시공물량 증·감 사항 반영에 따른 변경

□  주요 변경내역

공 종	규 격	단위	수 량		증·감	비고
			당초	변경
아스팔트포장(T=5㎝)	인력식소규모장비,주택가	a	135.0	138.0	3.0
도로경계석설치 (주택가인접, 재설치)	15×15×100, 350mm미만	m	1,089.0	1,171.5	82.5
빗물받이 설치	300×400, H=0.85m	개소	73.0	79.0	6.0
소형노면파쇄	밀링깊이T=5㎝, W=0.6m	a	122.0	124.6	2.6
콘크리트포장	3종, 인력, 무근,주택가	㎥	191.0	231.4	40.4

□ 공사비 변경 내역

(단위:원)

구 분	최초계약	전회(3회) 변경	금회(최종) 변경	증·감 (3회 대비)
총공사비	1,361,327,300	1,861,327,300	1,861,327,300	0
도 급 액	946,327,300	1,368,447,000	1,405,356,000	증) 36,909,000
관 급 비	280,657,000	348,897,300	313,942,300	감) 34,955,000
이 전 비	134,343,000	143,983,000	142,029,000	감) 1,954,000

□ 예산과목

❍ 도로과, 도로건설 및 도로시설물 구축, 도로기능 유지관리, 도로유지 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅲ . 검토 및 조치의견

□ 공종별 시공물량 증·감사항 발생에 대하여 설계변경심의위원회 심의를 실시하고 그 결과를 반영하여 설계변경(준공)시행 및 정산처리코자 함.

붙임   1. 설계변경(최종) 내역서 1부.

2. 제비율검증 결과 1부.  끝.