아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	실정보고 검토결과 송부(기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액 조정)-성산대교 본교 성능개선공사

1.업무지시현장 : 성산대교 본교 성능개선공사 풍림산업 주식회사, 성산대교 본교 성능

개선공사 주식회사 유신

2.작 성 일 자 : 2022-12-15 09:12:53

3.지 시 내 용

성산본교 22-174호(`22.12.06.)관련 성산대교 본교 성능개선공사 기타 계약내용의 변경

으로 인한 계약금액조정 요청 검토결과를 붙임과 같이 알려 드리오니 참고 하시기 바랍

니다.

가. 검토결과 요약 : 간접비는 현행법상 공기연장에 따른 변경계약이 선행되어야 하며

귀책사유에 따라의 간접비 청구, 조정 및 정산가능이 하나 본 건의

경우 공기연장없이 상호 합의하에 내역물량 변경을 통해 차수 공사

를 준공하였음

따라서 기타 계약내용의 변경(공기연장)으로 인한 계약금액 조정                          요건을 충족하지 못하여 간접비 청구는 불가한 것으로 판단 됨

붙 임 : 계약금액조정 검토 보고서 1부. 끝.

주무관	이회진		교량건설과장	전결 12/15
代김광호
협조자
시행	토목부-36504	(	2022.12.15	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-3708-2576	/전송	02-3708-2599	/	colaten@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)