문서번호	교량안전과-35783
결재일자	2022. 12. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
윤세희		代이상문	12/16
			조현석
협 조

- 2022년 한강교량 일상유지보수공사(2공구) -

설계변경(제4회,정산) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 12.

안전총괄실

(교량안전과)

- 2022년 한강교량 일상유지보수공사(2공구) -

설계변경(제4회,정산) 검토 보고

「2022년 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)-2공구」에 대하여 작업지시 물량 정산 등을 반영하여 설계변경(제4회,정산)을 시행코자 검토 보고드림.

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 2022년 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)-2공구

○ 규    모

- 아프팔트 포장 60a, 교면방수 6,150㎡, 신축이음보수 33m, 조류방지망 800㎡

- 균열보수 600m, 표면보수 160㎡, 단면보수 180㎡, 강재도장 4,800㎡ 등

○ 공사기간 : 2022.1.7 ~ 2022.12.31

○ 총공사비 : 3,054백만원(도급비 2,775, 관급비 229, 이전비 49)

○ 계 약 자 : (주)황용건설

○ 건설사업관리 : (주)동명기술공단 외 2개사

Ⅱ		보 고 내 용

○ 설계변경 사유

- 기 작업지시(11~21차)에 대한 물량 정산 및  현장여건 등에 따른 신규비목을 반영하고,  계약내역상의 공종별 물량을 정산 조정하고자 함

○ 설계변경 금액(제4회,정산)

(단위:원)

******	*****	*****	*************
****	*************	*************	**************
*****	*************	*************	**************
*****	***********	**********	**************
*****	**********	**********	**************

○ 공종별 물량 증∙감 현황

공 종	주 요 공 종	단위	수 량			비고
			당 초	변 경	증∙△감
******	*********	*	1***	*	******
********	*******	*	36**	****	******
******	*****	㎡	*******	*******	△3,648.7
***********	*******	*	344**	*****	△ 32**
********	****	*	1***	-	△ 10.0
***********	****	*	809**	*****	△695.1
********	******	*	136**	*****	-
********	***********	*	****	***	△ 18.5
*****************	********	*	11**	****	△ 0.4
************	******	*	***	***	*
******	******	*	118******	*********	84,433.0

○ 차수별 조정 내역

차수명 (위치)	주 요 공 종	금 액(천원)		증△감	관 련 근 거	비고
		당 초	변 경
**** ******	****************	336****	*******	*********	************** ************	****
**** ******	****************	110****	******	*********	************** ************	****
**** ******	***********	165****	*******	*********	************** ************	****
**** ******	**************	9****	*****	*	************** ************	****
**** ******	*********	282****	*******	*********	************** ************	****
**** ******	**********	2*****	******	*	************** ************	****
**** ******	************	*****	*****	*	************** ************	****
**** ******	**************	305****	*******	***	************** ************	****
**** ******	******	12****	******	*********	************** ************	****
**** ******	****	*******	*******	*	************** ************	****

○ 물량 증감 등에 대한 단가 적용

- **********************

- **************************************

※ ****************************

○ 제경비 중 보험료 등 사후정산 항목 정산 반영

- 연금보험료, 건강보험료, 퇴직공제부금비, 노인장기요양보험료 등

○ 고용개선지원비(주휴수당, 고용개선장려금, 전자단말기 등) 정산 반영

- 주휴수당: 20,595,616원, 고용개선장려금: 1,441,693원, 전자단말기 렌탈비: 1,800,000원

○ 관급비 및 이전비 정산

- 관급비: 아스콘(81,719,640원, 636톤, WC-6)

- 이전비:건설폐기물 처리(23,400,000원)

·폐콘크리트 77.25톤, 폐아스콘(평삭재) 550.88톤, 혼합폐기물 117.18톤

○ 계약금액 조정 검증결과 제경비 과다 산출액 없음

○ 계약기간 : 2022.01.07 ~ 2022.12.31(변경없음)

○ 책임건설사업관리기술인 검토의견 : 설계변경(제4회,정산) 적정함

Ⅲ		검 토 결 과

○ 금회 설계변경(제4회,정산)은 차수별(11~21차) 작업지시 물량 정산 및 현장여건에 따른 신규비목 등을 적용하였고, 전체 감액 설계변경으로 계약심사 대상아님

○ 설계변경 도서 검토결과 지방계약법, 공사계약 일반조건 등 관련 기준에 따라 적합한 것으로 판단되며, 또한 책임건설사업관리기술인의 설계변경 검토의견이 적정한 것으로 보고 등을 감안, 설계변경 시행하는 것이 타당한 것으로 사료됨

Ⅳ		조 치 의 견

○ 계약 담당부서(재무과)에 설계변경(제4회,정산) 계약의뢰하고, 준공시기가 도래함에 따라 사업예산의 신속집행을 위해 조속히 준공검사 후 준공금 지급코자 함

붙 임 : 1) 설계변경(제4회,정산) 도서 검토 제출 1부.

2) 합의각서 1부.

3) 제비율 검증확인서 1부.

4) 설계변경 도면 1부.