문서번호	현장민원과-32778
결재일자	2022. 12. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	중부수도사업소장
진원덕		유충현	12/16
			장청락
협 조	행정지원과장			신종선
	요금과장			강성오
	급수운영과장			김상웅
	시설관리과장			이동욱
	주무관			왕정순

'22년 중부수도사업소 관내

원격검침 전환 시범사업(1단계) 완료보고

2022. 12.

중부수도사업소

(현장민원과)

'22년 중부수도사업소 관내

원격검침 전환 시범사업(1단계) 완료보고

『상수도 원격검침 구축 기본 계획』 1단계(시범사업) 지역구축 및

검침  위험 해소를 위한 '22년도 스마트 원격검침 구축 완료 보고.

Ⅰ		추 진 개 요

❍ 관련 근거 : 본부장방침-767(2022.1.26.) 및 계측관리과-863(2022.01.28.),

현장민원과-1759(2022.02.11)

❍ 사업 내용 : 기존 계량기를 스마트계량기로 교체  및 단말기 설치(1단계)

❍ 대상 지역 : 대현산04 중블록(중구),북악02 중블록(성북구)

- 단 대현산04 중블록(중구)이외 중구지역 내 만기도래 계량기를 스마트 계량기로 전체 교체

❍ 대상 수전 : 7,600수전(대현산04:1,330, 북악02:5,098, 그외지역 1,172)

❍ 사업비(단말기 설치) 집행: 당초 881백만원(집행액:482백만원,낙찰차액:399백만원)

Ⅱ		원격검침 전환 구축사업 추진 결과

□ 스마트계량기 및 단말기 설치 현황(50mm이하)

❍ 스마트 계량기 교체 : 10,920수전

(단위 : 수전)

구 분		대 상	교체완료	미교체 (교체장애)	추진율 (%)	비 고
총 계		7,600	10,920	656	143.7
시범지역	소계	7,304	6,648	656	91.0
	대현산04	1,948	1,444	504	74.1	중 구
	북악02	5,356	5,204	152	97.2	성북구
그외 중구지역		296	4,272	-	144.3	시범외지역

※ 교체장애 656수전은 "'23 ~ '26년 원격검침 전환 교체 사업" 시 병행 교체 예정

❍ 스마트 단말기 설치  : 7,600수전

(단위 : 수전)

구 분		대 상	설치완료	미설치	추진율(%)	비 고
총 계		7,600	7,600	-	100.0
시범지역	소계	6,646	6,428	-218	96.7
	대현산04	1,442	1,330	-112	92.2	중 구
	북악02	5,204	5,098	-106	98.0	성북구
그외 중구지역		954	1,172	+218	122.9	시범외지역

※ 스마트 계량기 설치 후 단말기 미설치 3,318수전: '23년 중구 지역 원격검침 전환 사업 시 병행 설치

□ 시범지역 계량기 교체 장애 현황 및 대책

❍ 시범지역 장애수전 현황

(단위:수전

구 분	계	공가 (빈집,부재)	장애물 적치	관노후	매 몰	공간 협소	기 타	재건축, 재개발
비율(%)	656 (100.0%)	247 (37.7%)	110 (16.8%)	66 (10.1%)	53 (8.1%)	52 (7.9%)	99 (15.1%)	29 (4.4%)
대현산04	504	190	98	51	44	36	71	14
북악02	152	57	12	15	9	16	28	15

※ 기타 : 교체거부,보호통장애,밸브고장,심도장애,공사현장 등

❍ 장애수전 문제점 및 대책(해소방안)

- '23 ~ '26년 원격검침 전환사업시 병행교체 시행 예정

- 지역 특성상 구도심, 상가가 많고, 장애물 적치, 수용가 부재 등 사유로 신속한

계량기 교체작업 추진 불가

⇒(대책) 사전 협조 안내문 발송 및 현장 방문 수용가 설득 협조 요청

- 수용가 측 옥내배관 노후로(아연도강관,동관,PE관) 교체 시 파손 우려에 따른 위험 부담

⇒(대책) 사전 협조 안내문 발송 및 현장 방문 수용가 설득 협조 요청

- 관노후 및 공간협소, 매몰, 밸브고장, 심도장애 등 서울시 귀책사유 계량기

⇒(대책) 서울시 귀책사유 교체장애 계량기 리스트 작성 및 공사부서간

유기적인 협조체계로 우선 장애 해소 후 교체 추진

Ⅲ		향 후 계 획

□ 원격검침 전환을 위한 검침값 현장 검증 : 수시(단말기 설치 즉시)

❍ 검침방법 전환을 위한 현장 검증 요청 : 요금과, 시설관리공단

- 고객번호,계량기 번호,단말기번호 일치여부 및 검침값 이상 유무 등

□ 1단계 시범지역 및 그외 지역 원격검침 전환 수전 유지관리

❍ 스마트 계량기 및 단말기 유지관리 : 현장민원과

- 원격검침 수전 계량기 교체(고장 등) 시 단말기 연결까지 포함하여 스마트

계량기로 교체, 연속적인 검침 가능 유지

❍ 원격검침기 유지관리 및 스마트 계량기 교체 인원 충원 요청 : '22. 12월

(행정지원과 → 본부 총무과, 계측관리과)

- 요청인원 : 2명(원격검침기 유지관리 1명, 현장 계량기 교체원 1명)

□ 원격검침 2단계 사후 추진 계획 수립 : '23. 1월

❍ 중구 지역 4개 중블록(약 31,045수전) 원격검침 전환 시행

❍ 종로구, 성북구, 용산구 전역으로 스마트 계량기 및 단말기 설치 확대

Ⅳ		행 정 사 항

□ 원격검침 전환 시범사업(1단계) 완료 내역 제출 (현장민원과 →  본부 계측관리과)

붙임 : 1. 원격전환 단말기 설치 내역 대장 1부.

2. 미교체(장애수전) 현황 대장 1부.

3. 단말기 미설치대장  1부.   끝.