아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(1차) 및 차수별 부기금액 변경시행(2022년 길동 외 7개동 상수도공사)

우리사업소에서 시행하고 있는 『2022년 길동 외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1차)을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2022년 길동 외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 도 급 자 : (주)철호건설  대표 김용호

다. 계약기간 : 2022.6.22. ~ 2023.6.30.(총 공사부기기간:2022.6.22.~ 2023.6.30.)

라. 설계변경 내용 : 신공종 발생 및 계약물량 증․감

마. 설계변경 내역                                                     (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
총 부기금액	617,070,440	617,070,440	-
1차 부기금액	450,000,000	259,714,000	감 190,286,000
2차 부기금액	167,070,440	357,356,440	증 190,286,000

바. 설계변경 사유 : 시공물량 증,감 및 신공종 발생 등으로 차수별 계약금액 변동

사. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,급배수공사비,신설공사비

상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,지원사업성시설비

상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,수선유지비

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비(소블록배급수관망개선)

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비

[장기사용 배급수관(350mm이하)정비]

붙임  1. 설계변경 심의 의견서 1부.

2. 설계변경 내역서(1차) 1부.

3. 차수별 변경내역서 1부.

4. 합의서 1부.  끝.

주무관	김민성		안전관리팀장	최진규		시설관리과장	윤복철		강동수도사업소장	12/16
代최광운
협조자
시행	시설관리과-36187	(	2022. 12. 16.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5219	/전송	02-3146-5239	/	ms001214@seoul.go.kr	/	부분공개(5)