문서번호	시설보수과-27943
결재일자	2022. 12. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
강연홍		임형규	12/16
			代최영무
협 조

『여의2교 보수공사』

설계변경(정산) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 12.

강서도로사업소

시 설 보 수 과

『여의2교 보수공사』

설계변경(정산) 검토 보고

『여의2교 보수공사』와 관련으로 감독기관인 서울시설공단으로부터 설계변경(정산) 사항이 제출되어 검토보고후 조치하고자 함

※ 관련근거

○ 공사감독1처-7402호(2022.12.16)-설계변경(정산)보고서 제출

Ⅰ		공 사 현 황

□ 공 사 명 : 여의2교 보수공사

□ 공사기간 : 2022. 7. 25 ~ 2022. 12. 21

□ 공 사 비 : 500,000,000원(예산편성)

▶ 공사발주 : 500,000천원(도급비 496,210천원, 이전비 3,790천원)

▶ 공사계약 : 도급비 438,070,000원(낙찰차액 58,140,000원)

□ 공사개요 : 콘크리트 표면보수 2,579㎡. 단면보수 232㎡, 기타 1식

□ 도 급 자 : 해주건설(주)  대표  신진하

□ 공 정 율 : 100%

Ⅱ		보 고 내 용

□ 설계변경 보고 : 서울시설공단

1. 설계변경 사유 : 발주청 추가 작업지시 및 현장 실정보고에 의한 신규공종 발생 및 시공수량 변경에 따른 설계변경

2. 설계변경 주요내용

1) 발주청 요청에 따른 추가시공 수량 반영

• 관련근거 : 시설보수과-24971호('22.9.19)

• 주요내용 : 표면보수 및 단면보수 추가 시공

2) 현장 실정보고 및 승인에 의한 물량변경 및 신규공종 발생

① 관련근거 : 제1회 현장실정보고 건

• 공사감독1처-5401호('22.10.14) 및 시설보수과-26007호('22.10.24)

• 주요내용 : 전력선 구간 작업제외 등 현장여건 반영 작업 시행

② 관련근거 : 제2회 현장실정보고 건

• 공사감독1처-5427호('22.10.17) 및 시설보수과-26007호('22.10.21)

• 주요내용 : 거더부 콘크리트 박락구간 및 층분리 확인 구간에 대한 보수방안 보고

③ 관련근거 : 제3회 현장실정보고 건

• 공사감독1처-6735호('22.11.23) 및 시설보수과-27038호('22.11.25)

• 주요내용 : 시공 구간중 기보수 및 추가손상구간 발생에 따른 보수물량 변경

3) 실 시공물량 실측에 의한 수량변경

4) 기타 보험료 등 실정산 반영

3. 주요공종 수량 변경(증.감) 현황

공 종	규 격	단위	수 량		증·감
			당 초	변 경
단면보수	주간,벽체	㎡	59.0	38.1	감) 20.9
	주간,천정	㎡	106.6	28.0	감) 78.6
표면보수	주간,벽체, 천정	㎡	1,848	2,709	증) 861.0
	야간,벽체, 천정	㎡	731.0	389.6	감) 78.6

4. 공사비 변경(증.감) 현황

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증·감
총 공사비		441,860,000	388,144,000	감) 53,716,000
도급비	공급가액	398,245,455	352,530,000	감) 45,715,455
	부가가치세	39,824,545	35,253,000	감) 4,571,545
	계	438,070,000	387,783,000	감) 50,287,000
이 전 비		3,790,000	361,000	감) 3,429,000

Ⅲ		조 치 의 견

1. 공사 시행시 발생된 사항에 대하여 공사의 품질확보를 위해 기 실정보고 및 승인한 사항으로 시설공단 보고내용과 같이 설계변경(정산) 하여 공사 시행에 만전을 기하고자 합니다.

▣ 공사비 증감내역

구 분		당 초	변 경	증・감
총 공사비		441,860,000	388,144,000	감) 53,716,000
도급비	공급가액	398,245,455	352,530,000	감) 45,715,455
	부가가치세	39,824,545	35,253,000	감) 4,571,545
	계	438,070,000	387,783,000	감) 50,287,000
이 전 비		3,790,000	361,000	감) 3,429,000

Ⅳ		향 후 계 획

○ 2022.12. : 설계변경 계약

○ 2022.12. : 공사준공

첨부 : 1) 공문 및 공사 실정보고서 3부.

2) 변경설계도서 1부.  끝.